문서번호	조경과-2990
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울로7017운영팀장	조경과장
김상주		정용숙	02/24 이원영
협조	조경시설팀장		하재호
	주무관		온수진

- 서울로 7017 편의시설 인테리어 관련 -

실무회의 개최(2차) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

푸 른 도 시 국

(조  경  과)

- 서울로 7017 편의시설 인테리어 관련 -

실무회의 개최(2차) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2017. 2.23.(목) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 푸른도시국 조경과장 집무실 (무교별관, 더익스체인지 서울빌딩 9층)

○ 참 석 자

- 서울시 : 조경과장, 조경시설팀장, 관광안내서비스팀장, 서울역기획단(사업관리팀장), 건축부(담당)

- 용역사 : 이교석 팀장(MVRDV)

- 감리단·시공사 : 장진택 이사(건축 감리),  박대서 소장(건축 현장소장)

- 인테리어 설계 : 이래모 이사(디자인 담)

- 서울관광마케팅(주) : 노준식 팀장 등 2명

○ 논의사항 : 관리사무소·편의시설 인테리어 관계 및 추진일정 논의

□ 회의결과

○ 만리동 관리사무소 시설배치 관련

- 샤워실은 남·녀 구분 설치

- 교각(P28) 서측에 탕비실 설치

- 자전거거치대는 제외

○ 휠체어 충전소 관련

- 이용자 배려 등을 위해 실내 배치 검토 : MVRDV와 도기본(설비부) 협의 제시

○ 만리동카페 화장실 설치 관계

- 관광사업과[서울관광마케팅(주)]에서 설치 여부 검토하고 공식 의견 제시 예정

○ 퇴계로 여행자 카페(2층)

- 회의실, 자원봉사자실, 다목적홀 구분은 공간 활용도 등을 위해 폴딩도어 처리

○ 위탁시설(8개소) 관련

- 공사기간을 감안 최소한의 디자인 자문만 시행하여 조속 추진

붙임 : 1. 편의시설별 공사진행 상황

2. 회의자료 1부.  끝.

서울로 7017 편의시설별 공사진행 상황

위 치	편의시설 명		유/무인	직 경 (m)	높 이 (m)	바닥면적 (㎡)	현 공 정 (2.22. 기준)
	변 경 전	네이밍 자문 결과
지상 구간 (회현역5번출구 ~고가시점)	호기심화분	호기심화분 (보여요)	무인	D=2.00	H=3.10	2.09	터파기 착수
	관광안내소+7017 기념관	서울로안내소	유인	D=5.00	H=4.05	13.53	되메우기, 철골기둥 및 상부보 설치
	SHOP	서울로가게	유인	D=5.00	H=4.05	13.53	수벽 거푸집 설치 및 철근 배근
고가 상부	목련카페	목련○○○	유인	D=6.35	H=4.75	16.12	벽체 철근배근 및 거푸집 제작설치
	목련스테이지	목련무대	무인	D=5.00	H=0.60	11.97	골조공사 완료
	전망카페+꽃집	수국○○○	유인	D=7.65	H=5.00	42.50	수벽 거푸집 제작설치 및 철근배근
	호기심화분	호기심화분 (신비해요)	무인	D=2.00	H=3.10	20.90	위치변경 예정 (P12~13 사이)
	친수공간 (족욕탕)	공중자연쉼터	무인	D=3.50	H=0.67	9.61	골조공사 완료
	트렘폴린(2개)	방방놀이터	무인	D=3.00	H=2.50	7.07 7.07	골조공사 완료
	전시장(아욱과)	서울로전시관	유인	D=6.35	H=4.75	16.12	기둥 및 벽체 철근배근, 거푸집 제작설치
	장미카페	장미○○○	유인	D=8.33	H=5.00	41.84	고가상부 수벽 및 슬래브 거푸집 설치
	장미무대	장미무대	무인	D=4.20	H=4.50	13.20	거푸집 해체 및 벽체 철근배근
	정원관리체험관	정원교실	유인	D=6.35	H=4.65	16.12	지붕슬래브 철근배근 및 단열재 설치
	인형극장	인형극장	무인	D=2.50	H=3.80	3.56	지붕슬래브 서푸집 설치 및 철근배근
	호기심화분	호기심화분 (들려요)	무인	D=2.00	H=3.10	20.9	철근배근 등 기초부 수정
고가 하부 (퇴계로교통섬)	퇴계로 여행자 카페(1층)	서울로 여행자카페	유인	D=13.0	H=7.30	119.79	기초 철근배근 및 거푸집 설치
	관리사무소(2층)	(자원봉사자실, 공유공간)				110.93
고가 하부 (만리동광장)	키오스크	도토리○○○	무인	D=3.50	H=3.80	9.08	창호 프레임 제작
	여행자 카페	7017 ○○○	유인	D=13.0	H=4.40	119.79	창호 프레임 제작
	화장실관리소 등(고가하부)	서울로 관리사무소	유인	35.40m (길이)	10.00m (폭)	354.00	벽체 철근배근 및 거푸집 설치