문서번호	도시철도사업부-2101
결재일자	2017.2.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
이덕배		권영민	02/27 박동룡
협조

『신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)』

´17년 3월 휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

2017. 3.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)』

´17년 3월 휴일 감리 근무계획 승인 검토 보고

신림선 도시철도 민간투자사업(1공구) 건설공사와 관련 ‘17.3월 휴일 작업계획에 따라 감리 근무계획 승인 요청에 대한 검토 보고임.

* 신림동부2017-042호(2017.02.27.)와 관련임.

□ 휴일작업 및 감리 근무계획

○ 관련근거

- 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 및 제5장 제2절 6.2

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제11조③항

○ 근무사유

- 원할한 공정추진 및 연속적인 작업시행을 통해 작업공간 확보, 가시설    공정 등을 신속하게 추진하여 시민불편 해소에 만전을 기하고자 함.

○ 휴일근무 주요내용

근무일자	근무형태	근 무 자	시공사 휴일 작업내용		비고
3.04. (토)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
			103 정거장	보도 후퇴 및 차선 확보
3.11. (토)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
3.12. (일)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
			103 정거장	보도 후퇴 및 차선 확보
3.18. (토)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
			103 정거장	보도 후퇴 및 차선 확보
3.25. (토)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
			103 정거장
3.26. (일)	주 간	***** *****	102E 환기구	파일천공 및 항타
			103 정거장

□ 검토 결과

○ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 통해 시민불편 최소화를 위하여 아래와 같이 휴일작업 승인조건을 부여하고 감리원의 휴일 근무계획을 승인코자 합니다.

- 휴일작업 승인 조건

․휴일작업에 소요되는 감리원 대가는 입찰안내서 제5장 과업내용서 제2절   6.2.2에 따라 원인제공자인 시공사 부담

․공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

․소음 · 먼지 · 통행불편 등 시민불편이 발생하지 않도록 하고 보행자 도우미, 교통         신호수 배치 등 공사장 주변 안전사고 예방에 만전을 기할 것

․휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

․주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

- 업무 지시

․감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

․감리자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

․휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업 시행토록 할 것

․사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련 절차에 따라 상황 보고토록 할 것

․작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

․휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

․소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저

붙  임   휴일 작업 감리근무계획 승인 요청 공문  1부.  끝.