“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	상월곡역 사이언스 스테이션 조성을 위한 전기공사 계약변경 의뢰

1. 경제정책과-19324(2016.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 ‘상월곡 사이언스 스테이션’ 조성을 위한 전기공사에 대하여 아래와 같이 계약변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 상월곡역 사이언스 스테이션 조성을 위한 전기공사

2. 계약업체: (주)보령전설

3. 계약금액: 금22,321,420원(금이천이백삼십이만일천사백이십원)

4. 계약기간: 2016.11.24. ~ 2017.12.14.

5. 계약변경 내용                                       (단위: 원)

구분	당초	변경	비고
계약기간	2016.11.24. ~ 2017.12. 14.	2016.11.24. ~ 2017. 1. 20.	37일 연장

5. 변경사유: 설계도면 작성 및 공사 관련 부서와 협의

6. 예산과목

- 경제진흥본부 경제정책과, 활력이 넘치는 경제환경구축, 기업활동지원체계 구축, 홍릉창조경제 지식단지 조성, 시설비(401-01)

붙임  1. 방침서 1부.
2. 합의각서 1부.  끝.

	경제정책과장
주무관	김학현		홍릉클러스터팀장	이남숙		산업거점조성반장	12/14 김재진
협조자	계약1팀장	조현
시행	경제정책과-19336	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 무교로청사 7층 산업거점조성반	/	http://economy.seoul.go.kr/
전화	02-2133-4838	/전송	02-2133-0881	/	khh1212@seoul.go.kr	/	부분공개(7)