함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰

원수관리과-531(2014.3.27)호와 관련,「강북취수장 감시제어시스템 유지관리용역」시행중 아래와 같이 정산사유가 발생하여 정산 시행하고 변경계약 의뢰합니다.

가. 사 업 명 : 강북취수장 감시제어시스템 유지관리용역

나. 용역기간 : 2013.9.1 ∼ 2014.3.31

다. 도 급 자 : ###############

라. 계약금액

(단위 : 원)

당초 계약금액	변경 정산금액	증·감	비 고
21,456,000	17,000,000	감 4,456,000	수시점검부문 정산

마. 변경내역 : 붙임“정산보고서 및 변경(정산)설계서”참조

바. 변경사유 : 수시점검부문 공량(투입시간) 감소에 따른 정산

붙 임 : 1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경(정산)설계서 1부. 끝.

	원수관리과장
★주무관	김향석		원수관리과장	03/27 손주옥
협조자	주무관	하수용
시행	원수관리과-534	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지 (경강로682)	/
전화	02-3146-5226	/전송	02-3146-2238	/	greensee@seoul.go.kr	/	부분공개