문서번호	시설과-991
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	동부공원녹지사업소장
윤유환		변규열	03/27 이춘희
협조
	시설팀장		홍순철

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사(토목)』

관급자재(레미콘) 추가구매 검토 보고

2014. 3

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사(토목)』

관급자재(레미콘) 추가구매 검토 보고

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사』시행중 중차량 통행에 따른 콘크리트 포장두께 변경과 관련 관급자재인 레미콘 추가구매에 대한 보고임

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성공사

○ 공사기간 : 2012.12.20 ~ 2014.04.30

○ 공사금액 : 2,060,277천원

○ 공사개요 : 건축물 3개동 신축(지상 2층, 연면적 830.84㎡), 칼라콘크리트포장 10,715㎡, 흄관부설(D450mm) 285m

○ 도 급 사 : 케이디종합건설(주) 대표 백승묵 등 3개사

Ⅱ		보고 내용

○ 관급자재 현황(2013년 구매)

물품식별 번호	품 명	단위	단가 (원)	구매량		필요량		추가구매량
	규 격			수량	금액(원)	수량	금액(원)	수량	금액(원)
10063090	레미콘	㎥	55,600	1,182	65,719,200	1,950	108,420,000	768	42,700,800
	25-18-08
	조달수수료	0.54%			354,880		585,460		230,580
	합 계				66,074,080		109,005,460		42,931,380

○ 현황 및 문제점

▸ 당초 놀이동산 바닥콘크리트 포장두께가 10cm로 설계되어 있으나, 용역설계사 의견조회 결과 T=10~20cm로 변경되어 레미콘(25-18-8) 관급자재가 부족한 실정임.

○ 검토의견(공단)

▸ 용역설계사의 의견 결과에 따라 관급자재인 레미콘(25-1808)을 변경 추가구매함이 타당하다고 판단됨.(관급비 42,931천원)

Ⅲ		검토의견

○ 레미콘 추가물량에 대하여 계약부서(공원운영과)로 관급자재 추가구매 요청하고, 증가에 따른 관급비는 추후 설계변경시 반영

○ 상기 검토의견을 공사감독부서에 통보하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.  끝.