문서번호	급수운영과-3716
결재일자	2017.2.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		02/28 유용일
협 조
	주무관			박홍

“명품 아리수, 명품 강남수도”

설계변경 심사요청에 따른 보고 (2016년 청담동외 6개동 상수도공사)

2017년  2월

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심사요청에 따른 보고

우리사업소가 시행하는 “2016년 청담동외 6개동 상수도공사”의 계약물량 증․감 등 변경사항이 발생되어 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자함.

□  공사개요

□ 공 사 명 : 2016년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : D=13~400mm, L=1,496m

□ 계약기간 : 2016.06.29. ~ 2017.06.30

□ 도 급 비 : *************

□ 도 급 자 : ****************

□  설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 계약물량 조정

□ 주요 시공물량 증․감 내역

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
토 공	터파기(기계100%)불량	㎥	***	***	*****
	잔토상차(집하장)	㎥	***	***	*****
	잔토소운반(0.18터파기동시상차)	㎥	***	***	*****
	아스팔트 포장절단	m	****	****	*****
부설공	주름마디 스텐관 부설공(D13)	m	**	**	***
	주름마디 스텐관 부설공(D20)	m	**	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D25)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D30)	m	**	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D40)	m	**	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D50)	m	**	***	****

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
부설공	상수도관 부설공(D80)	m	**	***	*****
	상수도관 부설공(D100)	m	***	***	***
	상수도관 부설공(D150)	m	***	***	*****
	상수도관 부설공(D200)	m	**	***	****
구조물공	원형밸브실 설치공	개소	**	**	***
부대공	작업차량(급수공사)	개소	***	***	****
	안전원	인	***	***	****

□ 신규공정 발생내역

- 부설공 : K.P 죠인트관 접합공외 1공정 추가 등

- 사급자재 : 부단수활정자관(100/100)외 3종

□ 설계변경 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감
도 급 비	************	************	*************
공급가액	************	************	*************
부가가치세	***********	***********	*************

□  향후 계획

- 계약 물량 증․감 및 신규 공정 발생에 따른 ****************으로 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자함.

붙임 : 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.