문서번호	정수과-1099
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이준호		김효상	02/28 최석기
협 조
	정수시설과장			윤종민
	주무관			이극희
	주무관			정갑평
	주무관			김경식

오존접촉조“내오존 방수·방식 공사”에 따른

맛·냄새물질 대응 수질관리 대책

2017. 2

뚝도아리수정수센터

오존접촉조“내오존 방수․방식 공사”에 따른

맛․냄새물질 대응 수질관리 대책

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 공사 관련,  오존 접촉조 “내오존 방수․방식공사” 시행으로 고도정수처리 운영이 중단됨에   따라 맛․냄새물질 대응 수질관리 대책을 수립하여 추진코자 함

□ 내오존 방수․방식 공사

○ 시행 목적

- 오존처리 시 발생되는 오존가스 및 오존수와 접촉하는 오존접촉조, 활성       탄지 연결수로 등 상수도시설물 균열이나 침식 발생 차단

○ 공사기간 : ‘17. 3. 1 ~ 5. 24

○ 오존접촉조 방수․방식공사 일정

오존접촉조와 활성탄지 연결수로

- C-zone(1,000㎡) 시공 : ‘17. 3. 01~ 3. 31

- A-zone(3,365㎡) 시공 : ‘17. 3. 01~ 4. 10

- B-zone(3,365㎡) 시공 : ‘17. 3. 27~ 5. 08

- 수질검사(연구원)        : ‘17. 5. 09~ 5. 24

※ 뚝도 고도정수처리 운영 중단 : ‘17. 3. 5 ~ 4. 24(50일 예정)     <오존 접촉지 평면도>

□ 수질현황 및 문제점

○ 원수 수질

- 내오존방식공사에 따른 고도정수처리 운영중단 시기인, 봄철 갈수기에        원수 맛․냄새물질 발생 시, 수질관리 어려움 예상

수질기준:20ng/L

지오스민: 최대 25.7ng/L(‘16.4.18)

수질관리목표:8ng/L

2-MIB: 최대 6.1ng/L(‘16.5.2)

<자양 원수(‘16년 3월~5월)>

○ 수질관리 문제점

- 오존접촉조 내오존방수․방식공사 기간 중, 맛․냄새물질 원수 고농도        유입 시, 분말활성탄 투입을 통한 일반정수처리로 정수 수질관리 목표        8ng/L 초과 예상

□ 수질관리 대책

○ 분말활성탄 투입시설 점검 및 준비

- 착수정 분말활성탄(40%) 투입 준비(간이투입시설 설치: 착수정)

- 분말활성탄(5%) 자동투입시설〔사일로(250㎥×3기)〕점검

분말활성탄(40%) 24톤(착수정)	분말활성탄(5%), 8톤(사일로)

○ 분말활성탄 확보

- 분말활성탄 확보 : 자체 보유량 총 32톤(5ppm 투입 시, 21일 사용)

- 분말활성탄 자체 보유량 소모 시, 5개 정수센터 분말활성탄 지원

(2017. 2월 기준)

구분		분말활성탄
		계	5%	40%	20%
합계		35,310	잘못된 계산식	24,000	11,310
1	광암	11,310	0	0	11,310
2	암사	63,846	63,846	0	0
3	구의	8,732	8,732	0	0
4	뚝도	32,130	8,130	24,000	0
5	영등포	0	0	0	0
6	강북	31,416	31,416	0	0

○ 원수 수질 변화에 따른 선택취수 실시

- 맛․냄새물질 고농도 발생 시 자양·강북 선택취수로 원수 수질 관리

○ 맛․냄새물질 증가 시, 정수처리 강화

- 전염소 투입 중지(최소화) 및 중염소로 전환 투입

- 원수 pH 상승 시, 이산화탄소 투입을 통한 최적 응집상태 유지

- 응집플럭성장장치 및 흐름전위측정기를 활용한 최적응집상태 확인 및

고염기도 응집제(PAHCS)투입

- GC/MS를 활용한 냄새물질 분석 강화(2회/일 이상)

- 맛․냄새물질 변동에 따른 분말활성탄 최적량 투입 수시확인

□ 협조 사항

○ 보유분 소진시 타정수센터내 보관 중인 분말활성탄 지원(생산관리부, 정수센터)

○ 내오존 방식공사 신속 진행 및 통수 전․후 수질검사(시설부,연구원)

○ 맛․냄새물질 기준 초과 시, 생산량조정 수계전환 협의(생산관리부, 급수부)

○ 분말활성탄 투입 지원 및 타 정수센터 분말활성탄 운송(시공사 : 삼성물산)

※  첨부: 뚝도 내오존방수․방식공사 예정 공정표 1부. 끝.