급수공사 공사기한 연기 보고

주무관		주무관	시설관리과장			결재
안규태		강동철	02/28 김기상
협 조

2016년 영등포구 관내 상수도공사 감독업무 수행 중 아래와 같이 공사기한 연기 변경사유가 발생하여 보고합니다.

2017.  02.   .

직 지방시설서기 성명: 안규태

1. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 대상

연번	위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사 개요	시공업체
1	*********	***	‘17.02.21 ~ ’17.02.28	신설-260	50mm * 5m	********

2. 공사기한 연기 및 작업지시 변경 사유

- 현장 자재적치 및 가설건축물 미철거로 인하여 수요가 원에 의거 공사기한 연기

[공사 연기원 접수 : 첨부 참조]

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기한 변경하여 급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

연번	위치	당초 공사기간	변경 공사기간	비 고
1	*********	‘17.02.21 ~ ’17.02.28	‘17.02.21 ~ ’17.03.31	작업시기 미도래

첨부 : 공사연기원 1부.  끝.