문서번호	정수시설과-761
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
강병우		김긍채	02/28 代홍동섭
협조

여과지 역세송풍기

구매 발주방법 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.02.

여과지 역세송풍기 개량 계획

여과지 역세척용 송풍기는 루츠식으로 노후 인한 성능이 저하되어  터보식 송풍기로 연차적으로 교체하여 여과지 성능을 개선하고자 함

□ 현황 및 개량실적

○ 시설현황

품명	형식	규격	수 량	설치년도	비고
역세송풍기	루츠식	60HP (54㎥/min)	12대 (계열별 3대)	1997~1998년	역세척용

○ 개량실적

형식	규격	분류	수 량	개량설치년도	비고
터보식	75HP (62㎥/min)	1계열	2대	2016년	1계열 1대 미 교체
		2계열	3대	2016년
		3계열	3대	2014년
		4계열	3대	2015년

○ 교체 대상 : 여과지 1계열 1대분(루츠식⇒터보식)

- 1계열 2대는 2016년 교체 완료

□  추진 계획

○ 사업명 : 여과지 역세송풍기 개량공사

○ 사업개요

- 역세송풍기 설치 : 터보식 75HP 1대

- 에어배관,밸브류 등 설치 1식

- 제어설비등 부대설비 1식

○ 사업기간 : 2017. 1. 9 ~ 2017. 6. 30

○ 소요예산 : 65,000천원

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

□ 발주 방법

○ 역세송풍기구매 : 조달 구매 (약55,000천원)

- 입찰 참가 자격 변경

변경전	변경후
- 직접생산업체로써 최근 5년간 국내현장에 단단터보 송풍기 50HP(37kW)이상 납품실적이 있는업체	- 직접생산업체로써 주된 영업소가 서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

- 변경 사유 : 조달청 물품구매 실적제한입찰 업무처리기준(2014.7.1.)에                     의거하여 구매물품이 조달물품구매실적제한(320,000천원)

이하에 해당되여 입찰 참가 자격 변경

- 관련 근거 : 조달청 물품구매 실적제한입찰 업무처리기준(2014.7.1.)

○ 설치 공사 : 공개입찰 (약10,000천원)

□ 추진 일정

○ 현장조사 및 설계   : 2017. 1. 13까지

○ 설계심사(본부,본청) : 2017. 1. 31까지

○ 발주 및 계약       : 2017. 3. 1 ~ 2017. 3. 24

○ 착공 및 설치작업    : 2017. 3. 27 ~ 2017. 6. 23

○ 시운전 및 준공처리 : 2017. 6. 30까지

□ 사업 효과

○ 노후된 역세송풍기를 개량하여 역세척 효율증대로 고품질의          아리수 생산에 기여.