문서번호	기전과-2808
결재일자	2017.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	기전과장	강서도로사업소장
김근수	박재경	02/28 김용제
협 조

2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사(교통안전표지)

1차 설계변경 계획보고

2017. 02

강서도로사업소

(기전과)

2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사(교통안전표지)

1차 설계변경 계획보고

『2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사(교통안전표지)』에 대한 현재까지의 작업사항에 대하여 감리업체로 부터 설계변경 서류가 제출되어 아래와 같이 검토 보고 합니다.

공사 개요

공 사 명 : 2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사(교통안전표지)

공사기간 : 2016. 12. 28. ~ 2017. 05. 31.

도 급 액 : 84,869,740원

공사규모 : 교통안전표지 신설 78매

도 급 자 : ㈜ 관동건업 대표 배 효 직

감 리 자 : ㈜ 영호이앤씨 대표 서 태 교

설계변경 사유

관련근거 - 영원 17-02-03(2017.02.27)호 설계변경 요청

2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사(교통안전표지) 계약금액 감액 발생 - 계약번호 : 20161*******00

주요 물량 증 ․ 감 내역

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	변경사유	비 고
교통표지판 신설	매	78	78	-	물량 변경 없음
교통표지판 교체	매	0	0	-
교통표지판 도장·보수	매	0	0	-
교통표지판 철거·제거	매	0	0	-
교통표지판 이설	매	0	0	-

공사비 변경내역

구 분		당 초	변 경	감액	비고
총공사비		84,869,740	81,540,000	3,329,740	건강·연금보험 산업안전비등 미정산
도급비	공급가액	77,154,309	74,127,273	3,027,036
	부가가치세	7,715,431	7,412,727	302,704
	계	84,869,740	81,540,000	3,329,740

조치 계획

위 보고내용과 같이 작업시행한 결과 기존 물량은 변경없고, 건강·연금보험산업안전비등 미정산으로 감액되었기에 설계변경 시행하여 변경계약 하고 최종 준공처리 후 공사대금을 지급 하고자 설계변경합니다.

붙임1) 2016년 도심내 자전거도로망 확충사업공사 1차설계변경 1부.

2) 설계변경 내역서  1부.  끝.