투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(총차1회, 1차1회)시행-사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

1. 시설보수과-1776(2017.2.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)』에 대한 설계변경(총차1회, 1차1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사 건설사업관리용역(장기계속)

나. 용역기간 : (총차) 2016. 4. 1 ~ 2017. 10. 30.

(1차) 2016. 4. 1 ~ 2017. 2. 28

다. 계 약 자 : ㈜한국건설관리공사, ㈜대한콘설탄트

라. 설계변경 내역

구 분	총 차		1차
	당 초	변 경	당 초	변 경
도 급 비	602,890,000	616,690,000	258,000,000	366,735,000

마. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 사천교 확장, 시설비 및 부대비, 감리비(▲42,000,000)

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 감리비(▲66,735,000)

바. 설계변경 사유

- 사천교 확장 및 성능개선공사 기술자 투입계획 조정 및 물가변동 반영

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					김종성					시설보수과장					신동헌					서부도로사업소장						02/28 한동근
협조자				주무관							윤미란					관리단속과장							박종윤
시행			시설보수과-1818										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)