문서번호	정수시설과-166
보존기간	년
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
양봉우		김창현	03/27 이철해
협조

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

『광암아리수 정수지 출입구 및 계단시설 개선공사』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

『광암아리수 정수지 출입구 및 계단시설 개선공사』

설계변경 심의 소위원회 개최결과 보고

우리 정수센터 『광암아리수 정수지 출입구 및 계단시설 개선공사』에 따른 설계변경 사전심의 소위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 광암아리수 정수지 출입구 및 계단시설 개선공사

게약기간 : 2013.07.03 ~ 2014.03.31

공사내용 : 출입구설치 11개소, 출입문설치 11개소, 계단설치 11개소,

잔디식재 2,239㎡

도 급 액 : 287,522,600원(당초) → 280,367,000원(변경)

도 급 자 : 엔에치건설주식회사 대표 김재경

Ⅱ		심의위원회 개최 개요

개최일자 : 2014. 03. 27(목)  10:30~11:00

개최장소 : 정수시설과 사무실

심의내용 : 물량 증·감 적용 적정여부, 신규공종 단가적용 적정여부,

설계변경 내역 적정여부

참석위원 : 정수시설과장 김창현외 4명

Ⅲ		개최결과 및 조치의견

설계변경심의 소위원회 설계변경 적정여부에 대한 검토사항 심의결과 심사위원 전원이 적정의견 제시함.

심의위원 모두 적정의견으로 설계변경 원안대로 공사를 시행코자 하며, 계약부서에 계약변경의뢰코자 함.

따로붙임 : 설계변경 심의 소위원회 개최 의견서 1부.  끝.