문서번호	건축부-3783
결재일자	2014.3.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
현승주		박하규	03/27 이병석
협 조
	주무관			박경철
	주무관			김홍석

『공무직 노동조합 사무실 리모델링공사』

설 계 용 역  시 행 계 획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

도시기반시설본부

(건축부)

『공무직 노동조합 사무실 리모델링공사』

설 계 용 역   시 행 계 획

우리 본부에서 추진중인 『공무직 노동조합 사무실 리모델링공사』와 관련, 노후 건축물 구조안전진단을 통한 내구연한 증대와 시설기능을 확대하고 건축, 설비, 전기 등을 개선하기 위하여 설계용역을 아래와 같이 시행하고자 함

1		사업개요

○ 위    치 : 성동구 용답동 249-19(중랑물재생센터내)

○ 용    도 : 노동조합 사무실

○ 규    모 : 지하1층 ~ 지상2층, 연면적 345.29㎡

○ 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12

○ 사 업 비 : 300백만원(공사비 280백만원, 설계비 20백만원)

○ 공사개요

▻ 구조보강공사 및 옥상․벽면 방수공사

▻ 각 실 냉․난방설비 설치 및 천장텍스공사

▻ 장애인 출입구 설치 및 노후한 시설 개선공사

2		추진경위

○ 2014.03.03 : 공무직 노동조합 사무실 리모델링공사 사업계획 수립

○ 2014.03.04 : 공사추진 협조요청(공원녹지정책과→건축부)

○ 2014.03.14 : 기술용역타당성 심사 결과 통보(기술심사담당관→건축부)

○ 2014.03.17 : 예산 재배정 요청(건축부→공원녹지정책과)

○ 2014.03.26 : 예산 재배정 통보(공원녹지정책과→건축부)

3		설계용역 시행계획

○ 설계용역 개요

▻ 설 계 비 : 19,547천원(부가세포함)

▻ 용역기간 : 착수일로부터 70일

▻ 용역범위(기본 및 실시설계)

- 건축․기계․전기․통신․소방․조경․폐기물처리 등 리모델링공사 전체

- 구조안전진단을 통한 구조보강공사

○ 예산과목 : 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원 유지관리 및 이용                  활성화, 공무직 사무실 리모델링(시설비)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 수의계약 선정사유 : 유사 실적보유[붙임참조] 및 부적격업체의 채택 방지

○ 수의계약 관련근거

▻ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호

▻ 지방자치단체 수의계약 운영요령(안전행정부 예규 제2호, 2013.03.26)

○ 수의계약 대상자

▻ 업체명 : ㈜토디아 건축사사무소(T.02-593-7774)

▻ 주  소 : 서울시 서초구 효령로 103(조선회관빌딩 202호)

▻ 대  표 : 정창모

4		향후 추진계획

○ `14.04. ~ `14.06. : 설계용역 착수 및 준공

○ `14.07. : 공사발주 및 계약

○ `14.08. ~ `14.12. : 공사 착공 및 준공

붙임 : 1. 사업계획 방침서 1부.

2. 기술용역타당성 심사결과 1부.

3. 수의계약 대상자 용역수행실적증명 등 관련서류 1부.

4. 설계용역비 산출서 1부.

5. 과업내용서 1부.  끝.