의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-3420	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.3.2.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	물순환정책과장,기획담당관

주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
박종헌	박홍봉	손경철	03/02 권기욱
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 126번, 진영 의원, 국방위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

진 영 의원(국방위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 126번

□ 요구내용

6. 한강로 일대 방재시설 확충사업 관련

1) 사업진행 계획/현황/예산/추진과정 포함 설명자료

- 2014~2017년 예산설명서 첨부

(국비/시비 구분, 예산 요청/반영 과정 설명)

2) 향후 사업진행 일정 설명자료

7. 한남역 앞 빗물펌프장 증설공사 관련

1) 사업진행 계획/현황/예산/추진과정 포함 설명자료

- 2017~2017년 예산설명서 첨부

2) 해당사업 관련 민원 접수/답변내역 첨부

6. 한강로 일대 방재시설 확충사업 관련

1) 사업진행 계획/현황/예산/추진과정 포함 설명자료 및

2) 향후 사업 진행일정 설명자료는 다음과 같습니다.

※ 2014~2017년 예산설명서 자료는 용량문제로 별도 송부합니다.

한강로 일대 방재시설 확충사업

Ⅰ		사업개요

○ 사업목적 : 2010년 침수지역인 한강로 일대와 삼각지 및 신용산 지하차도    주변 방재시설 확충을 통해 침수피해를 방지하고 재해를 예방하고자 함.

○ 사업기간 : 2013. 12. ~ 2018.06

○ 사업내용 : 유역분할 및 펌프장 신설

- 펌프장  신설 : 면적 2,364㎡, 용량 1,010톤/분(한강대교 북단)

- 유역분할 관거 : ▣2.0×2.0~D2,400mm, L=1.26km(용산역~한강)

- 기존관거 정비 : D=1,000mm, L=1.98km

○ 기대효과

- 한강로 일대 방재시설 확충을 통해 집중호우에 대비한 수방대처능력 구축

- 주민의 생명과 재산을 보호 수방행정의 신뢰 구축

○ 총사업비 : 50,718백만원

구 분		계	기 투 자	2014	2015	2016	2017	2018
계		50,718	1,407	14,800	6,844	6,924	12,562	8,181
	국 비(50.0%)	24,054	-	7,400	3,422	3,462	5,035	4,735
	시 비(50.0%)	24,055	-	7,400	3,422	3,462	7,527	2,244
	시비 기타	2,609	1,407					1,202

※ 시설별 소요예산

구 분		계	기투자		2014		2015		2016		2017		2018
			국비	시비	국비	시비	국비	시비	국비	시비	국비	시비	국비	시비
계		50,718	-	1,407	7,400	7,400	3,422	3,422	3,462	3,462	5,035	7,527	4,735	3,446
	펌 프 장	30,958	-	1,407	7,400	5,400	1,722	1,722	1,962	1,962	3,200	5,692	491	-
	우수관로	19,760	-	-	-	2,000	1,700	1,700	1,500	1,500	1,835	1,835	4,244	3,446

Ⅱ		추진현황

○ `10.09.21. : 침수피해 발생(한강로 일대 및 신용산역, 신용산역 지하차도)

○ `11.03.08. : 한강로 일대 자연재해위험지구 지정

○ `13.07.26. : 기본 및 실시설계 완료

○ `13.06.23. : 주민설명회 개최(한강로동 주민센터 30여명)

※ 펌프장 설치반대 관련 민원 없었음

○ `13.12.27. : 펌프장 공사 착수

○ `14.04.22. : 조직화되고 집단화된 민원제기(414명), 대안검토 착수

주민 요구사항	빗물펌프장 설치 반대(타지역으로 펌프장 이전) 빗물펌프장 위치변경시 펌프장 설치 조건부 찬성 - 빗물펌프장 노출 최소화 - 공사로 인한 주민불편 최소화 - 향후 지역 재개발시 빙창펌프장 폐쇄
서울지방국토관리청 허가조건	빗물펌프장 위치변경에 따른 제체 안전성 확보 진동 저감시설 보강 주민동의 확보

○ `14.07.24. : 제방측 펌프장 위치변경 주민설명회 개최(용산구, 3회)

○ `14.12.26. : 펌프장 제외지 설치 하천점용허가 완료(국토관리청)

○ `15.03.02. : 공사재개

○ `16.12.20. : 관로공사 2구간 완료

○ 공사추진현황

- 전체 공정율 : 55%

- 빗물펌프장 설치(공정율 : 64%)

▫ 가시설 및 토공작업 완료, 기초콘크리트 타설 시행

- 관로공사 1구간(TPS공법)(공정율 : 95%)

▫ 토출관로 설치(▣3.0×1.8m), L=102m/ D1,800㎜×2련, L=108m

▫ 관로설치(D2,400㎜), L=178m

- 관로공사 2구간(TSJ공법)(공정율 : 100%)

▫ 관로설치(D2,400㎜), L=209m

※ 미 착공구간 : 관로공사 3구간(L=145.9m) : 3월 착공예정

관로공사 4구간(L=533m) : 3월 착공예정

Ⅲ		향후계획

○ 빗물펌프장 설치

- `17. 12월 : 빗물펌프장 구조물 공사 완료 예정

○ 관로공사 2구간(TSJ공법)

- `17. 04월 : 관로공사 준공

○ 관로공사 3구간(STM공법), 관로공사 4구간(개착구간)

- `17. 03월 : 공사 착공

- `18. 06월 : 준공(예정)

따로붙임 : 1)한강로 일대 방재시설 확충사업 예산설명서(2014~2017년, 별도송부). 끝.

7. 의원님께서 요구하신 한남역 앞 빗물펌프장 증설공사 관련 계획 및 현황 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1) 사업진행 계획/현황/예산/추진과정은 다음과 같습니다.

□  사업개요

○ 위    치 : 용산구 한남1동 531-3(1970년 설치)

○ 규    모 : 펌프장 증설 1,360㎥/분(1,200 → 2,560㎥/분)

- 펌프시설 : 534㎥/min×1대(향후 2대 추가 설치)

- 건 축 물 : 기존 건축물 리모델링 1,058.4㎡

건축물 신축 530.0㎡

○ 공사기간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 총사업비 : 10,126백만 원(시비)

('17년 2,800백만원, '18년 7,173백만원)

한남빗물펌프장

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	시설비	설계비	감리비	비고
총사업비	10,126	9,973	153	-	‘17년 사업비 2,800

□  그간 추진경위

○ '07. 06. : 기상이변 대비 수방시설 능력향상 타당성 조사

○ '10. 12. : 풍수해대책 종합결과보고(시장방침 477호)

○ '12. 06. : 서울시 투자심사 시행(조건부 승인)

○ '15. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료(서울시)

○ '17. 02. : 계약심사 시행 (서울시 계약심사과)

○ '17. 02월 현재 : 공사발주 준비 중

□   향후 추진일정

○ '17. 03. : 주민설명회 개최

○ '17. 04. : 공사계약 및 착공

○ '17. 04. ~ 05. : 유수지 내부 진입로 확장, 복개구조물 철거

○ '17. 05. ~ 10. : 수방기간 공사 중지

○ '17. 10. ~ 11. : 가시설 설치 및 기초공사

○ '17. 11. ~ '18. 05. : 토목 구조물 공사

○ '18. 05. ~ 08. : 펌프장 건축물 신축, 기존 건축물 리모델링

○ '18. 05. ~ 11. : 전기․기계설비공사 실시

○ '18. 12. : 공사 준공

2) 본 사업과 관련 민원 접수내역은 현재까지 없습니다.

따로붙임 : 2) 2017년 한남빗물펌프장 예산설명서 1부(별도송부).  끝.

※ 2016년은 예산 편성이 없어 별도 예산설명서는 없습니다.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	박홍봉 김중영
	☎2133-3863 2133-3878	담당자	진학성 김재웅
	작 성 일 : 2017.2.