다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역 외 1건)

1. 도로계획과-3867호(2014.3.26)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 “여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역” 외 1건에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요 및 준공기한 연기내역

용역명		여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역	여의교 확장 외 1개사업 지반조사용역
계약자		㈜건화 대표 최진상 외 1	㈜신우지오엔지니어링 대표 노연희
준공기한	당 초	2014.03.31	2014.03.31
	변 경	2014.06.30	2014.06.30

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

첨부 : 1. 준공기한 연기의뢰서 각1부.

2. 준공기한 연기보고서 1부.

3. 변경계약 합의각서 2부. 끝.

	도로계획과장
주무관	신대식		간선도로계획팀장	代임춘근		도로계획과장	03/27 형태경
협조자
시행	도로계획과-3889	(		)	접수		(		)
우	100-101	서울시 중구 세종대로 110 서울특별시청 10층	/
전화	2133-8077	/전송	2133-0763	/	sds9561@seoul.go.kr	/	대시민공개