문서번호	행정지원과-2170
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	행정지원과장	서울도서관장
최문환	이현숙	03/07 이정수

2017년 국·시비보조금 지원

공공도서관 실태점검 결과보고

2017. 03.

서울도서관

(행정지원과)

2017년 국·시비보조금 지원 공공도서관 실태점검 결과보고

2017년도 국·시비보조금 지원받는 자치구 공공도서관 건립사업에 대하여 사업별 추진실태를 점검하고 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

▢ 점검일시 : 2017.02.06. ~ 2017.02.28

▢ 점검자 : 행정지원과장 외 담당자 1명

연번	자치구	사 업 명	‘17년 지원 계획(백만원)			비고 ('16년 지원)
			국비	시비	합계
1	마포구	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 지원	1,178	409	1,587	1,339(국시비)
2	강동구	천호3동 제2공영주차장 공공도서관 건립 지원	579	726	1,305	500(국비)
3	종로구	창신동 복합청사 내 도서관 건립 지원	558		558	318(시비)
4	송파구	위례신도시 내 공공도서관 건립 지원	990		990	573(시비)
5	은평구	신사동 공공도서관 건립 지원	2,067		2,067	1,262(시비)
6	구로구	신도림 도서관 건립	779	112	891	653(국시비)
7	노원구	노원구 아동복지관 내 어린이도서관 건립 지원	307		307	235(시비)
8	광진구	자양유수지 내 공공도서관 건립 지원		600	600	신규
9	성북구	길음동 문화복합미디어센터 내 공공도서관 건립 지원	450	728	1,178	신규
10	용산구	용산 구립 어린이‧청소년 도서관 건립 지원		561	561	신규
11	노원구	월계 문화복지센터 내 도서관 건립 지원		493	493	신규
12	서초구	내곡중학교 내 도서관 건립 지원		200	200	신규
13	중랑구	상봉2동 도서관 건립 지원		1,261	1,261	신규
14	도봉구	김근태 기념도서관 건립 지원		937	937	신규
계			6,908	6,027	12,935

▢ 점검대상 : ‘17년도 공공도서관 건립 지원대상 총 14개소

▢ 점검내용

○ 보조금 교부신청 내용과 사업현황의 적정여부

○ 공공도서관 건립사업 예산편성 현황

○ 보조금 지원 실제 집행시기 파악

○ 사업현장 조사 등 사업전반에 대한 검토

Ⅱ		점검결과

▢ 사업진행 현황

연번	자치구	사 업 명	추진현황	비 고
1	마포구	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 지원	지상층 골조 공사 중(공정률 50%)
2	강동구	천호3동 제2공영주차장 공공도서관 건립 지원	지상층 골조 공사 중(공정률 55%)
3	종로구	창신동 복합청사 내 도서관 건립 지원	실시설계진행 중, 5월착공예정
4	송파구	위례신도시 내 공공도서관 건립 지원	지상층 골조 공사 중(공정률 50%)
5	은평구	신사동 공공도서관 건립 지원	터파기 공사 중(공정률 5%)
6	구로구	신도림 도서관 건립	실시설계진행 중, 4월착공예정
7	노원구	노원구 아동복지관 내 어린이도서관 건립 지원	터파기 공사 중(공정률 5%)
8	광진구	자양유수지 내 공공도서관 건립 지원	실시설계진행 중, 7월착공예정
9	성북구	길음동 문화복합미디어센터 내 공공도서관 건립 지원	실시설계진행 중, 7월착공예정
10	용산구	용산 구립 어린이‧청소년 도서관 건립 지원	지상층 리모델링 공사 중(공정률 10%)
11	노원구	월계 문화복지센터 내 도서관 건립 지원	터파기 공사 중(공정률 5%)
12	서초구	내곡중학교 내 도서관 건립 지원	지상층 골조 공사 중(공정률 10%)
13	중랑구	상봉2동 도서관 건립 지원	실시설계진행 중, 4월착공예정
14	도봉구	김근태 기념도서관 건립 지원	실시설계진행 중, 9월착공예정

▢ 점검결과

○ ‘17년도 보조금 지원대상 14개사업은 제출된 사업계획서와 같이 적정하게

사업추진 중으로 국·시비 보조금 교부조치코자 함

○ 현재 공사중인 8개사업에 대해서 국·시비 보조금 우선 교부조치하고, 실시설계        진행중인 6개사업에 대해서는 향후 사업추진일정에 따라 적기에 보조금 교부

※ 국고보조금은 문체부 교부일정에 따라 교부

Ⅲ		향후계획

○ 2017. 3.~ 10. : ‘17년도 보조금 교부

○ 2017. 6. , 12. : ‘17년도 상하반기 사업추진실적 제출 및 정산보고

첨  부 : 자치구 사업별 현장사진 1부.  끝.