다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)평화엔지니어링 대표이사 권재원 귀하
(경유)
제목	성산대교 성능개선사업 1차 용역기간 변경사항 통보

1. 평소 우리시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 우리시와 계약체결하여 시행중인 『성산대교 성능개선 기본 및 실시설계 용역』과 관련 1차 용역기간 변경사항을 아래와 같이 통보하오니 계약업무 및 용역추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2013.11.1 ~  2015.4.24

다. 계약변경 내용

구 분	용역기간 변경내역		비고
	당 초	변 경
전체 용역	‘13.11.1~’15.4.24	변경없음
1차 용역	‘13.11.1~’14.3.30	‘13.11.1~’14.12.31

라. 변경사유 : 용역시행중 1차 용역기간이 2014.3.30일로 용역기간이  절대적으로 부족하여 용역기간 연장.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김귀용		한강교량팀장	하현석		도로시설과장	03/28 이용심
협조자
시행	도로시설과-5500	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 2동1층	/
전화	02)2133-1673	/전송	02)2133-1078	/	gyong@seoul.go.kr	/	대시민공개