문서번호	설비부-3646
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		代이종근	03/07 권오식
협조

『서울재사용플라자 건립 전기공사』

공사기간(총차,3차) 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

도시기반시설본부

(설비부)

『서울 재사용플라자 건립 전기공사』

공사기간(총차,3차) 연기 검토 보고

『서울재사용플라자 건립 전기공사』 진행 중 선행공정인 건축공사의 지연으로 후속공정인 전기공사 지연되어 공사기간 연기에 대한 실정보고가 있어 이를 검토하고 보고드림.

공사개요

◯ 건    명 : 서울 재사용 플라자 건립 전기공사

◯ 규    모 : 수배전반설비(1,000kVA×2대), 전력 및 조명 설비, 태양광설비 등

◯ 공사기간 : ‘15.06.15.~ ’17.03.15.(3차 ‘16.12.21~‘17.03.15.)

◯ 공 사 비 : 금2,607,967천원(3차 899,539,610원)

◯ 사 업 자 : (주)태광전력외 2개사

◯ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링외 1개사

관련근거

◯ PC재사용17-160호(2017.03.07.) 서울재사용플라자 건립 전기공사(총차, 3차)에 대한 공사기간 연장요청 보고

보고내용

□ 사 유

○ 선행공정인 건축공정 연기(‘2017.03.31.)로 후속공정인 전기공사의 공정이 지연되어 공사기한 연기 필요.

□ 공사기간 연장 현황

구 분	계약금액(원)	공사기간		증‧감	비고
		당초	변경
총 차	2,607,967,000	‘15.6.15~’17.3.15	‘15.6.15~’17.3.31.	16일연장
3 차	899,539,610	‘16.12.21~’17.3.15	‘16.12.21~’17.3.31	16일연장

□ 공사비 변경없음.

감리 검토의견

○ 선행공정인 건축공정의 공사기간 연장(16일)에 따라 전기공사에 대한 완료시점을 검토한 결과 2017년3월31일로 변경함이 적정할 것으로 판단됨.

조치의견

○ 전기공사(총차, 3차) 연기요청건을 검토한 결과 감리단 검토 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며

○ 건설총괄부에 전기공사(총차, 3차) 공사기간 변경을 요청하고자 함.

따로붙임 :  감리단 공문 1부(합의서 포함).  끝