문서번호	생산관리과-2451
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
채해바래	한희선	03/07 구자훈
협 조

『뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계 용역』

“용역기한 연장 ” 검토 보고

2017.  3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계용역』

“용역기한 연장 ” 검토 보고

『뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계용역』관련하여 문화재 현상변경 심의, 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족으로  “용역기한 연장”하여 시행하고자 검토 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계 용역

❍ 용역기간 : 2017. 01. 09. ~ 2017. 03. 09.

❍ 계약금액 : 32,735,000원

❍ 계 약 자 : ㈜현디자인

❍ 용역내용 : 뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계

Ⅱ		용역기한 변경계획

❍ 연장사유 : 뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성관련 문화재 현상변경                 심의 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족으로              용역기한 연장

❍ 용역기간 변경

【당 초】 2017. 01. 09. ~ 2017. 03. 09.

【변 경】 2017. 01. 09. ~ 2017. 04. 10.(증 32일)

❍ 계약금액 변경 없음

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 내용과 같이 뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 실시설계 용역기한 연장 후 본부 재무회계과로 변경 계약 요청 코자 합니다. 끝.