문서번호	토목부-4839
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	03/08 김영수
협조

교통안전시설물 설계 및 감리비 반영검토

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

2017. 3.

교통안전시설물 설계 및 감리비 반영검토

(새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

경찰청 및 도로사업소의 교통안전시설(노면, 표지판) 설치 협의 및 승인에 따라 관련 공사의 비용 반영을 검토 보고드림.

공사현황

○ 사 업 명 : 새문안로 중앙버스전용차로 설치공사

○ 위    치 : 서대문구 미동초교앞~세종대로 사거리

○ 규    모 : 전체 1,200m, 버스승강장 4개소 설치

○ 기    간 : 2016.11.30. ~ 2017. 6.30.

○ 사 업 비 : 2,019백만원(도급비:1,383백만원)

○ 시 공 사 : 국성산업개발(주), 감 리 사 : 제일엔지니어링외 1

○ 공 정 율 : 17%, 버스승강장 기초 설치중

실정보고

○ 교통안전시설 설계 및 감리비 반영 필요

- 도로사업소 승인을 위해서는  “서울시 교통안전시설 업무처리 지침”에 의거 관련 설계 및 감리자격의 일정 요건을 충족하는 업체 선정 필요

- 교통안전시설 설치와 관련 설계 및 감리업무를 수행할 수 있도록 소요 비용 반영 필요.

○ 교통안전시설 설계 및 감리업체 선정을 위한 적정성 검토

업체명	구분	자격기준	보유자격	적격여부
트래픽스	면 허	감리업, 설계업 등록 교통전문분야 신고	등록 2010.11.1. 신고 2010.11.1.	적 격
	실 적	최근 10년이내 누적실적 1,000만원이상 준공한 업체	설계 33,153천원 감리 111,120천원	적 격

○ 물량 검토

공 종	단위	수 량			비고
		당초	변경	증
1. 제경비 제외공사비
교통안전시설물 설계 및 감리용역	식	-	1	1

○ 사업비 검토                                           (단위 : 천원)

구 분	당초	변경	증	비고
제경비 제외공사비	-	30,300	30,300
공 급 가 액		30,300	30,300
부 가 가 치 세	-	3,030	3,030
도 급 액	-	33,330	33,330

○ 신규단가적용 검토 :  강제협의율(93.374%) 적용

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에 해당되는 설계변경으로 강제협의율 적용. ((86.747+100)/2=93.374%)

검토결과

○ 비용반영을 위한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당함으로 승인코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

변경 내역서 1부.   끝.