문서번호	설비부-3768
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		유병기	03/08 권오식
협조

「서울재사용플라자 건립 기계설비공사」

관급자재(3종)납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울재사용플라자 건립 기계설비공사」

관급자재(3종) 납품기한 연기 검토보고

『서울 재사용플라자 건립공사』와 관련 선행공정 공사기간  연장에 따른 관급자재 납품기한 연기 검토 보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울 재사용플라자 건립 기계설비공사

○ 규    모 : 지하2층/지상5층(연면적 16,529㎡), 기계 및 소방설비 1식

○ 공사기간 : `15. 8. 1 ~ `17. 3. 15

○ 계약금액 : 4,824백만원

○ 시공/감리 : 광민건설(주)/펨코엔지니어링 외 1개사

□ 관련근거

○ 책임 건설사업관리기술자 실정보고(PC재사용17-171호, ‘17.3.8)

- 선행공정(건축) 준공기간 15일 연장(‘17.3.15 → ’17.3.31)

□ 관급자재 납품기한 연기

○ 납품기한 연기내용 (계약금액 변동없음)

품 명	수량	계약금액(원)	납품 기한		비 고
			당 초	변 경
지열히트펌프 구매(2차)	1식	834,219,140	2017.3.15	2017.3.31	증16일
자동제어구매설치	1식	650,000,000
공기조화기	9대	249,077,000

○ 연기사유 : 선행 건축공정 공사기간 연장으로 납품시기 미도래

○ 지체상금 : 미부과

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 선행 건축공사 공사기간 연장(16일 연장, 준공기한 ‘17.3.31) 에 따라 원할한 공사를 위해 관급자재 납품기한을 연기함이 타당함

□ 조치의견

○ 건설사업관리기술자 검토의견과 같이 선행공정 공사기간 연장으로 관급자재 납품기한 연기가 불가피함에 따라

○ 원활한 사업추진을 위해 계약담당부서에 납품기한 연기 의뢰코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 납품기한 연기 검토서 1부. 끝.