문서번호	서북권사업과-2122
결재일자	2017.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		개발관리팀장	서북권사업과장
박운희		박해일	03/08 차창훈
협조
	주무관		김성만

세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 협의체(실무운영팀) 회의 결과보고(3차)

2017. 3

지역발전본부

(서북권사업과)

세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 협의체(실무운영팀) 회의 결과보고(3차)

「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」관련 효율적인 업무추진을 위한 협의체(실무운영팀) 회의를 개최하고 이에 대한 결과보고임

회의개요

❍ 일  시 : 2017. 3. 7(화) 14:00 ~ 15:30

❍ 장  소 : 지역발전본부 회의실

❍ 참석자 : 9명

- 서북권사업과(3) : 개발관리팀장외 2

- 도시기반시설본부(1) : 건축부 담당자

- 도시공간개선단(1) : 도시건축센터 팀장

- 기타(4) : 대한성공회(김한승 신부, 박현배 관재부장), 감리단장, 시공사 소장

❍ 회의안건

- 우회도로 개설(안)에 대한 기관별 조치사항

- 시의회 안전진단 요청에 대한 대처방안 수립 등

회의결과

❍ 우회도로가 필요한 사유 및 개설 계획의 타당성에 대해 감리단에서 성공회 측에 사전 설명

(성공회) 내부회의 결과 현재 우회도로 설치계획(성공회 주차통로 사용)은 조선일보 출입차량(11톤) 통과시 성공회 성당 구조물에 영향 발생이 우려되므로 은행나무와 사업대상지 사이로 변경 검토요청

(감리단) 은행나무와 사업대상지 사이로 우회도로 설치시 조선일보 출입차량 회전반경 확보 어려움

- 덕수궁 측 도로 회전시 반대측 차로 침범으로 경찰서 협의가 어려움

→ 성공회 성당 구조물에 영향을 최소화할 수 있는 방안 추가검토 예정

ex) 우회도로상 매트 설치, 보조기층 추가설치 등 진동이 적게 발생하는 방안 검토

❍ 성공회에서는 우회도로 계획에 대해 조속히 결정 후 통보

(성공회) 우회도로 설치관련 세부 운영계획, 대체주차장 확보방안, 경찰서 협의결과, 공정계획 등 추진사항 전반에 대한 설명자료 요청

(감리단) 3.8(수)까지 설명자료 작성 후 성공회에 설명할 예정

❍ 대체주차장 관련 성공회 측 추가의견이 있는 경우 별도 제시요망

❍ 시의회 요구사항(안전진단 시행 후 공사진행) 수용시 2개월 공정지연 우려되므로 시의회 면담 후 별도 대책 수립

(도시기반시설본부) 3.8(수) 시의회 사무처장 면담 예정

❍ 지상광장 운영주체 결정은 실무운영팀 회의에서 결정하기 어려운 사항 으로 협의체 회의안건으로 상정 후 결정 필요

(도시공간개선단) 지상광장 운영 관련 실무자 입장에서는 반대의견 제시

❍ 변경설계 용역을 3월에 발주 예정이며 지하굴토 변경이 없으므로 공사진행 가능

❍ 우기대비 조속한 공사추진을 위해 철저한 공정계획 수립 및 관리 필요

행정사항

❍ 실무운영팀 회의개최(4차)

- 일  시 : ‘17. 4. 6(목) 14:00

- 장  소 : 지역발전본부 회의실(4층)

- 참석자 : 서북권사업과, 도시기반시설본부, 도시공간개선단, 성공회 등

※ 회의자료는 ‘17. 4. 4(화)까지 서북권사업과로 제출

붙 임 : 3차 회의자료 1부.  끝.