문서번호	도로시설과-3078
결재일자	2017.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장
박용화	代도형태	03/08 代양돈욱

2016년도 자동차전용도로 경계블록 및 측구 정비공사 추진 계획 보고

2017년도 자동차전용도로

경계블록 및 측구 정비공사 추진 계획 보고

2017. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

경계블록 및 측구정비공사 추진 계획 보고

자동차전용도로 공용연수가 늘어남에 따라 노후화가 심하게 진행된 경계블럭 및 측구에 대한 체계적 정비를 시행하여 배수기능을 원활히 하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

□ 시설물 현황

○ 노선별 설치현황 : 자동차전용도로 11개 노선(총 320,997m)

- 도로개설시 설치된 경계블록 및 측구의 공용년수가 약 20~30년을 경과

⇒ 단면결손, 수해파손, 부등침하 등 급격한 노후화 진행중

노선명	총 계	올림픽 대로	동부 간선	서부 간선	양재 대로	강변 북로	북부 간선	제물 포길	기타 노선
연장(m)	320,997	132,214	31,731	34,560	14,780	81,961	6,240	14,000	5,511
설치년도	-	1986	1994~ 2000	1986	1989	1997	1993	1986	-
이용연수	-	31	23~17	31	28	20	24	31	-

○ 시설물 노후 유형

시설물	파손유형	주요 파손원인	피해유형	비고
경계블록	단면결손	염화칼슘에 의한 염해손상	- 녹지대 토사유실 - 시설물 탈락에 따른 도로안전성 저해 - 미관저해
		차량 충돌에 따른 탈락
		사용연한 경과에 따른 노후화 진행
	선형불량	차량 충돌에 따른 융기 및 전도
측구	측구패임	사용연한 경과에 따른 노후화 진행	- 물고임(체수)에 의한 도로안전성 저해

- 현황사진

경계블록(단면결손)	경계블록(선형불량)	경계블록(염해손상)	측구(측구패임)

□ 관리현황 및 추진실적

○ 과거 관리현황

- 2015년도 이전 : 서울시설관리공단 민간위탁금으로 유지관리

• 사 업 명 : 자동차전용도로 도로부속물 정비공사(연간단가)

• 정비방향 : 파손된 경계블록 및 측구 부분정비 시행(소규모 부분 정비)

※ '13년도 정비실적 : 경계블록 L=1,036m, 측구 L=1,076m

※ '14년도 정비실적 : 경계블록 L=589m, 측구 L=14m

- 2015년도 이후 : 서울시설관리공단 민간대행사업으로 유지관리

• 사 업 명 : 자동차전용도로 경계블록 및 측구정비공사

• 정비방향 : 파손·노후된 경계블록 및 측구 부분정비 시행(대규모 구간 정비)

- 기존 정비방법(도로부속물 정비공사)은 경계블록 및 측구를 포함한 도로부속물 전체에 대하여 긴급 보수가 요구되는 시설 정비에 적합한 방법으로(연간단가) 전반적으로 노후된 시설물의 개량 정비가 어려움

- 경계블록 및 측구는 공용연수 증가에 따른 시설물 노후가 가속화되어 파손 및 변형 등이 다수 발생된 시설물로 노후 시설물의 예방적 유지관리를 위하여 2015년도 이후 민간대행사업을 편성하여 대규모 구간 정비를 시행중임

○ 추진실적 및 연차별 계획

노선명	전체	정비대상	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	비고
소요예산	(백만원)	7,369	986	700	1,500	1,920	2,263
소계(m)	320,997	66,614	7,789	6,018	9,172	18,800	24,835
올림픽대로	132,214	26,455	6,812	6,018	4,730	4,450	4,445
동부간선로	31,731	7,880	-	-	700	3,950	3,230
서부간선로	34,560	25,800	-	-	-	9,500	16,300
양재대로	14,780	600	-	-	-	600	-
강변북로	81,961	4,719	977	-	3,742	-	-
북부간선로	6,240	860	-	-	-	-	860
제물포길	14,000	300	-	-	-	300
기타	5,511	0	-	-	-	-	-

※ 강변북로 정비대상 증가(노후구간 추가 확인 L=2,064m) : 당초 L=2,655m, 변경 L=4,719m

□ 2017년도 정비계획

○ 사 업 명 : 자동차전용도로 경계블록 및 측구 정비

○ 사업내용 : 노후 경계블록 및 측구 정비

○ 총사업비 : 1,500백만원

○ 사업기간 : 2017.03 ~ 12

○ 추진방법 : 서울시설공단 민간대행사업으로 시행

○ 사업규모 : 올림픽대로 등 3개 노선 10개소 L=9,172m

연번	노선명(방향)	연장(m)	공 사 구 간	비고
소 계		9,172	5개소
1	올림픽대로(강일)	900	동호대교 지난 400m ~ 성수대교 지난 300m	본선1차로
2	올림픽대로(공항)	480	영동대교 전 250m ~ 영동대교(지난)200m	본선4차로
3	올림픽대로(공항)	780	천호대교 지난 500m ~ 1,280m	본선1차로
4	올림픽대로(강일)	1100	동호대교 하부 ~ 성수대교 지난 250m	본선4차로
5	올림픽대로(강일)	550	청담1교 지난 1,550m ~ 2100m	본선1차로
6	올림픽대로(공항)	920	성수대교 지난 350m ~ 동호대교 지난 200m	본선4차로
7	강변북로(일산)	1,350	원효대교 전 100m ~ 마포대교 지난 900m	본선1차로
8	강변북로(구리)	830	가양대교 전 400m ~ 가양대교 지난 450m	본선4차로
9	강변북로(일산)	1,562	반포대교 지난 370m ~ 동작대교 지난 1300m	본선1차로
10	동부간선로(성동)	700	강변북로 구리방향 진입램프	램프 우측

□ 향후 추진계획

○ 2017. 1.~2. : 현장조사

○ 2017. 3. : 자체설계 및 계약심사

○ 2017. 4. : 예산배정 및 공사발주

○ 2017. 11. : 공사 준공 및 정산

붙임 : 1) 정비 현황도(2015~2017년) 1부.

2) 2017 정비대상지 현장조사서 1부.  끝.