함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	영등포정수센터 친환경녹색 정수장 조성사업 설계용역 기간 연기

영등포정수센터 내 추진중인『친환경 녹색 정수장 조성사업 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 기간연장 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 영등포정수센터 친환경 녹색 정수장 조성사업 실시설계용역

2. 위    치 : 영등포구 노들로 11 영등포정수센터

3. 용 역 비 : 금46,601,450원(금사천육백육십만일천사백오십원)-변경없음

4. 도 급 자 : (주)신일에코텍주식회사 대표자 주상대

5. 용역기간 : 2017.1.9. ~ 2017.3.9

6. 용역기간 변경

○ 당  초 : 2017.1.9. ~ 2017. 3.9

○ 변  경 : 2017.1.9. ~ 2017. 3.16(7일연장)

7. 변경사유 : 서울시 계약심사중으로 계약심사 결과에 대한 이행을 위하여    기간연장

붙임 : 용역기간 연기 보고서 1부.  끝.

주무관							한광수			생산관리과장					한희선					생산부장					전결 03/08 구자훈
협조자				주무관						황한범					재무회계과장							박병식
시행			생산관리과-2530									(						)		접수											(						)
우																					/			http://arisu.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3146-1319					/													/	대시민공개