투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	낙산공원외 4개소 소나무재선충병 방제사업 설계변경 시행

1. 녹지관리과-1873(2017.03.07)호와 관련입니다.

2.『낙산공원외 4개소 소나무재선충병 방제사업』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 낙산공원외 4개소 소나무재선충병 방제사업

나. 공사기간 :  2017.03.3~03.22

다. 시 공 사 : ㈜ 다산나무병원(대표 임현아)

라. 설계변경 내용 : 별첨 참조

마. 도급액 변경 내역

구 분		금 액 (원)		증 감 액	비 고
		당 초	변 경
도 급 비	총 계	19,800,000	22,000,000	증2,200,000
	공급가액	18,000,000	20,000,000	증2,000,000
	부가가치세	1,800,000	2,000,000	증200,000

바. 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태복원 및 보전과 야생동물보호,

생태계보전사업, 산림병해충방제, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

첨 부 : 1. 관련 방침 1부.

2. 설계변경내용 및 내역서 1부.  끝.

주무관	김완수		녹지관리팀장	임광빈		녹지관리과장	03/09 김윤철
협조자	재무팀장	정동철
시행	녹지관리과-1930	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5944	/전송	02)3783-5949	/		/	대시민공개