투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(철근콘크리트용 봉강) 물량변경 요청(세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사)

우리부서에서 시행중인 『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』에 지급되는 관급자재에 대해 아래와 같이 변경 요청합니다.

가. 변경내역

연번	품 명	계약번호 (납품 요구번호)	규 격	단위	수량변경내역
					당 초	변 경	증 감
1	철 근	12-16-1-69239-00	HD-16, SD500	톤	0.836	-	감) 0.836
2			HD-19, SD500	톤	35.747	25.872	감) 9.875
3			HD-22, SD500	톤	4.002	0.000	감) 4.002
4		12-16-1-60662-01	HD-25, SD500	톤	89.309	10.100	감) 79.209
5			HD-10, SD400	톤	24.473	16.957	감) 7.516
6			HD-13, SD400	톤	63.827	54.231	감) 9.596
7			HD-16, SD400	톤	-	72.703	증) 72.703
8			HD-19, SD400	톤	-	17.174	증) 17.174
9			HD-22, SD400	톤	-	10.691	증) 10.691
10			HD-25, SD400	톤	-	2.480	증) 2.480
합 계					218.194	210.208

나. 사    유 : 문화재 발굴 및 보존으로 인한 설계변경에 따른 물량변경

다. 귀책부서 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과).  끝.

	건축부장
주무관	박재웅		건축총괄과장	박범규		건축부장	03/10 김진용
협조자
시행	건축부-4136	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-5577	/전송	02-2133-0828	/	parkarchi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)