문서번호	도로시설과-5514
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장
최우용	김준섭	03/28 이용심

’14년 자동차전용도로 방호울타리 정비계획

2014.  3.

도 로 시 설 과

’14년 자동차전용도로 방호울타리 정비계획

노후 및 기준 미달인 자동차전용도로 방호울타리에 대한 세부적인 정비계획을 수립하여 도로교통 안전에 만전을 기하고자 함.

１		시설 현황

○ 자동차전용도로 방호울타리 현황                      (2014. 3. 현재)

총 계	방호울타리 설치 구간					방호울타리 미설치 구간
	소 계	가 드 케이블	보 형 방 호 울타리	강 성 방 호 울타리 (토공,교량)	기 타 (옹벽,교량 ,보행자용)	소 계	설치 필요 구간	설치 필요 외 구간
486,175m	456,865m	28,956m	212,688m	177,509m	37,712m	29,310m	5,080m	24,230m

※ 세부내용 : #붙임 1, 2

２		정비 방향 및 기준

○ 정비방향

- 기준에 미달 또는 등급상향이 필요한 방호울타리와 미설치구간 중 사고사례, 도로 및 시설물 여건, 노후도 및 안전성 등을 종합 검토하여 정비 우선 순위 결정

※ 방호울타리 정비시, 노후·파손된 도로경계석 및 측구 일제 정비

- 정비 우선 순위를 근거로 정비 시급성에 따라 현행기준에 적합하게 순차적으로 교체·정비

· 1순위 : 미설치구간, 사고발생구간(사고다발 순)

· 2순위 : 곡선구간(곡선반경 작은 순)

· 3순위 : 직선구간(추락 등 위험도 높은 순)

· 기 타 : 1~3순위의 현장여건에 포함되지 않는 구간

○ 방호울타리 등급기준

- 「도로안전시설 설치 및 관리지침(2014. 2)」적용

[도로안전시설 설치 및 관리지침, 2014. 2.] : 현행기준

설계속도	적용구간	등 급
		SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7
·일반구간 60km/시 70km/시 80km/시	- 기본구간	◎	○
	- 위험구간			◎	○
	- 특수구간(타 도로와 교차 등) - 특수 중차량 통행이 많은 구간				◎	○
·고속구간A 90km/시 100km/시	- 기본구간		◎		○
	- 위험구간				◎	○
	- 특수구간(타 도로와 교차 등) - 특수 중차량 통행이 많은 구간					◎	○

주) 1. ◎표시는 일반적으로 설치하는 등급

2. ○표시는 도로여건이나 시설물 개발 수준 등 위험도에 따라 상향적용 가능한 등급

３		연차별 정비계획 및 추진현황

○ 연차별 정비계획 변경

구 분		계	2013	2014	2015	2016	2017 ~	비 고
당초	규 모(m)	54,050	11,242	12,000	12,000	12,000	6,808
	총사업비 (억원)	110	21	25	25	25	14
변경	규 모(m)	58,479	11,897	9,577	10,505	10,500	16,000
	총사업비 (억원)	128	21	20	25	25	37

※ 변경사유

가. ’13년 정비대상 물량 변경(증 4,429m) : #붙임3

나. ’14년 예산편성액(20억원) 반영

다. 방호울타리 정비시, 도로경계석 및 도로측구 정비 병행

[증가 소요예산(개략)]

· 방호울타리 : 연장 × 평균단가(m당)        = 4,429m × 200천원         =   885,800천원

· 도로경계석 : 연장 × 평균단가(m당) × 적용률 = 46,234m × 60천원 × 20% = 2,774,040천원

· 도 로 측 구 : 연장 × 평균단가(m당) × 적용률 = 46,234m × 40천원 × 20% = 1,849,360천원

총 소요예산                       = 1,810,480천원 ≒ 18억원

○ ’13년 정비실적 : 추진율 20%

(단위 : m)

구 분	총 정비대상 (#붙임3)	’13 정비 (#붙임4)	미정비 물량 (’14년 현재)	비 고 (추진율)
계	58,479	11,897	46,582	20.34%
가드케이블	39,279	10,323	28,956	26.28%
보형방호울타리	12,568	370	12,198	2.94%
강성방호울타리(이동식)	348	-	348	-
미설치 구간	6,284	1,204	5,080	19.16%

※  노선 및 순위별 미정비 현황(2014년 기준) : #붙임5

４		2014년 정비계획

○ 2014년 정비계획(우선순위 1순위 해당) : 9,577m

(단위 : m)

구 분	방 호 울 타 리					경계석 정 비	측 구 정 비	비 고
	계	가드케이블 (→보형방호울타리)	보 형 방호울타리 (→보형방호울타리 등급상향)	이동식 방호벽 (→보형방호울타리)	미설치 구 간 (→보형방호울타리)
계	9,577	8,715	130	348	384	5,508	2,700	#붙임 6, 7
강변북로	568	36	-	348	184	228	-
올림픽 대로	9,009	8,679	130	-	200	5,280	2,700

※ 자재 선정 및 시공법에 따라 예산범위내에서 정비 구간 및 물량 조정

○ ’13년 정비사업 추진시 문제점 및 개선방안

구 분	문 제 점	개 선 방 안	비고
시공도면 작성	▷ 2013년 방호울타리 정비공사 중 지장물(가로등, 교통정보 케이블선 등)을 훼손, 공사가 지연되는 경우 발생	▶ 시공도면(방호울타리, 도로경계석, 측구)에 가로등 지주 등 각종 지장물 위치 반영후 대책수립하여 공사 시행 ※ 지장물 관계자(공단) 입회하에 공사 시행
콘크리트 경계블록 및 도로 측구	▷ 제설작업(염화칼슘)에 의해 열화, 훼손된 콘크리트 경계블록 및 측구 정비 미시행으로 자동차전용도로 기능 및 미관 저해 ▷ 콘크리트 경계블록 및 측구 정비(철거→타설→양생)에 소요되는 기간동안 교통정체 및 안전사고 우려	▶ 방호울타리 정비구간중 노후·파손된 콘크리트 경계블록(도로경계석 포함)을 도로경계석으로 방호울타리와 병행 정비.
		▶ 자동차전용도로 배수에 대한 장애요인(빗물받이 등 배수시설, 도로구배 등)이 없을 경우, 아스팔트로 측구 정비 ※ 아스팔트 측구 시공구간에 대하여 모니터링 실시 및 분석후 평가	#붙임8

5		추진계획

○ 2014.  4. : 현장조사 및 설계

○ 2014.  5.

- 자재선정위원회 개최(공단) 및 계약심사(공단 → 시)

- 민간대행 사업비 배정(시 → 공단)

○ 2014.  6. : 공사 발주 및 계약

○ 2014.  7. : 공사 착수(시공도면 작성)

○ 2014. 10. : 공사 준공

6		행정사항

○ 관련 기관(부서)별 협조사항

- 도로사업소

· 2013년도 방호울타리 정비공사 관련 자료 제출(→ 도로시설과, 시설관리공단)

- 시설관리공단

· 시공도면 작성

· 지장물(가로등, 케이블 등)훼손 방지를 위하여 관계자 입회하에 공사 시행

· 아스팔트 측구 시공구간(올림픽도로 5개구간, 3,778m)

※ 모니터링 실시 및 분석후 평가

· 방호울타리 정비내용 : 도로관리시스템, 현황도, 세부목록 등재

※ 붙 임

1) ’13, ’14년도 방호울타리 물량 변동 현황 및 사유 1부.

2) ’13, ’14년도 방호울타리 집계표 비교 및 ’14년도 집계표 1부.

3) 방호울타리 정비대상 집계표 및 세부현황(2013년 기준) 1부.

4) 2013년도 방호울타리 정비완료구간(사업소 및 시설공단) 1부.

5) (노선 및 순위별)미정비 현황 집계표 및 세부목록(2014년 기준) 1부.

6) 2014년 방호울타리 정비계획 검토결과 1부.

7) 2014년 방호울타리 정비계획(위치도 및 사진, 17개소) 1부.

8) 도로측구 개선사항 검토 1부.  끝.