투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제1경사로 가설울타리(EGI휀스) 보강설치 실정보고 회신

1. 공사감독2처-1355(2017. 3. 9.)호와 관련입니다.

2. 제1경사로 가설울타리(EGI휀스) 보강 설치(바닥 H빔 추가 설치 등)는 기 시설하여 1개월 이상 사용한 결과 공사 및 안전 등에 특이사항이 발생되지 않는 것으로 것으로 확인되며, 본 공사 사업비가 부족한 상태입니다.

3. 따라서, 향후 가설울타리 상태 등을 수시로 점검후 안전 등에 이상이 발견될 경우 보강을 검토하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,충정종합건설주식회사 현장대리인 최재복 귀하
주무관	박중모		치수시설과장	조성만		방재시설부장	03/10 남궁용
협조자
시행	방재시설부-4000	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8772	/전송	3708-8756	/	p05480548@seoul.go.kr	/	대시민공개