문서번호	토목부-4968
결재일자	2017.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
정문수	여용석	전결 03/10 김영수
협 조
	차고지관리팀장		강철규

지반조사 계획 보고

(신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계)

2017. 3.

도시기반시설본부

( 토  목  부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

지반조사 계획 보고

(신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계)

현재 수행 중인 『신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계 』용역의 지반조사계획서가 제출되어 보고하는 내용임.

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 신림공영차고지 건설공사 기본 및 실시설계용역

◦ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

◦ 용역내용 : 부지면적 10,232㎡

- 공영차고지 : 101면 (지상1층, 지하1층)

- 빗물저류조 : 35,000㎥ (지하2층)

- 건축면적   : 1,553.63㎡ (관리동, 기타 부속시설)

◦ 용역기간 : 2016.12. 1. ~ 2017.11.30.

◦ 용 역 비 : 906,300,000원

◦ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜도화엔지니어링 - 토목

㈜조우엔지니어링종합건축사사무소 - 건축

▢ 근 거 : ㈜유신 지반터널-17-593호(2017. 2.16)와 관련임.

▢ 추진현황 (공정률 : 10.0%)

◦ '10. 7.21. : 공영차고지 추가 조성계획 수립

◦ '14. 3.17. : 양재대로 지하화 타당성조사 및 기본계획 수행

◦ '14. 7.17. : 신림공영차고지 조성 사업계획 변경

◦ '15. 2.28. : 실시설계(진입로 조성) 용역

◦ '15.11. 6. : 투자심사 완료

◦ '15.11.17. : 타당성 조사 용역(지하 저류조 포함)

◦ '16. 3.10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

◦ '16. 9.29. : 도시계획시설사업 실시계획인가고시

◦ '16.12.31. : 기본 및 실시설계 용역 착수

◦ '17. 3. 현재 : 설계자문회의 준비 중

▢ 보고내용

◦ 본 과업을 수행 중인 용역업체로부터 가시설, 비탈면 및 구조물 기초지반의 안정성 검토 등의 설계 자료로 활용하고자 지반조사 계획서가 제출되어 검토한바,

◦ 과업 내용서에 명시하고 내역서에 미 반영된 시험 항목 중 실제 설계에 필요한 시험에 대하여 설계 반영이 필요한 실정임.

◦ 시추조사 및 시험 현황

항 목		수량내역		조사 기준 및 설계 활용 계획
		당초	변경
현장 조사	시 추 조 사	8공	8공	- 사방 30~50m 간격, 최소한 2~3개소 - 가시설, 토공 및 구조물구간 ⇒ 지층분석, 가시설 및 기초 설계
현장 시험	표준관입 시험	40회	40회	- 공당 1.0m마다 1회 (풍화암까지) ⇒ 토질분류 및 지반정수 산정
	현장투수 시험 (토사, 암반)	-	4회	- 침투해석 (0.5회 / 공) ⇒ 가시설 설계 (벽체차수공법 및 굴착면 침투수)
	공내재하 시험 (토사, 암반)	-	4회	- 변형계수, 침하량 계산 및 수치해석 (0.5회 / 공) ⇒ 가시설 설계 (벽체 및 버팀보 등 제원 결정)
	공내전단 시험 (토사, 암반)	-	4회	- 전단강도 산정 (0.5회 / 공) ⇒ 가시설 설계 (벽체 및 버팀보 등 제원결 정)
실내 시험	실내 토성 시험 (함수비, 밀도, 액소성, 입도)	-	8회	- 토질분류 및 토질정수 산정 (1.0회 / 공)
	실내 암석 시험 (일축압축 시험)	-	8회	- 암반분류 및 암반강도정수 산정 (1.0회 / 공)

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 설계를 위한 지반조사 계획에 대하여 승인하고자 하며,

◦ 지하매설물 보호를 위하여 지하매설물 사전 조사 및 굴착 허가 등을 득한 후 지반조사를 시행하고 실제 조사 물량에 따라 설계변경 후 정산 처리하고자 합니다.

- 추가 소요액 : 10백만원

▢ 향후계획

◦′17.03. : 지반조사

붙임 : 용역업체 공문 1부.  끝.