투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울기록원 건립공사 건설폐기물처리용역 계약변경(1차) 의뢰

1. 건축부-2646호(2017.02.13)와 관련입니다.

2. 우리 본부가 시행중인『서울기록원건립공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경(1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울기록원 건립공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약기간 : ’16.3.10.~’18.3.9(총차) / ’16.3. 10~’17.3.9(1차)

다. 계약금액 : 금168,638,000원(1차:금155,317,000원)

라. 계 약 자 : ㈜문안이엔티, 가람산업주식회사

마. 계약변경 내용

구 분		변경 전	변경 후	비고
계약 금액	총 차	168,638,000원	좌동	변경없음
	1 차	155,317,000원	좌동	″
계약 기간	총 차	2016.3.10∼2018. 3.9	좌동	″
	1 차	2016.3.10∼2017. 3.9	2016.3.10.~2017.12.31	기간연장

바. 예산과목 : 정보공개정책과, 정보관리강화, 기록물시설관리, 서울기록원 건립, 시설비 및 부대비

붙임   1. 건설폐기물처리용역 1차 계약변경 검토보고서 사본 1부.

2. 건설폐기물처리용역 1차 계변경약 요청(선진엔지니어링) 1부.

3. 합의각서 1부(별도송부). 끝.

	건축부장
★주무관	송옥의		복지시설과장	조영수		건축부장	전결 03/10 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-4140	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)