	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(안내판) 납품기한 연기요청(마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사)

우리본부가 공사 시행 중인『마포석유비축기지 재생 및 공원조성공사』관급자재(안내판)에 대한 납품기한을 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 연기 요청내역

계약번호 (납품요구번호)	품 명	납품기한		비 고
		변경 전	변경 후
00158077101 (12-16-2-37463-00)	안내판 (안내판, 삼정건설미공, SJ / H-05, 450x600mm, 위치안내)	2017.3.12	2017.4.29	수량 : 4개

나. 납품기한 연기사유 : 관급자재 사용시기 조정으로 인한 납품기한 연기.  끝.

	건축부장
주무관	정재철		건축총괄과장	박범규		건축부장	03/13 代박범규
협조자
시행	건축부-4288	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2604	/전송	02-3708-2659	/	arc44136@seoul.go.kr	/	부분공개(5)