문서번호	도시철도설비부-3161
결재일자	2017.3.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	설비계획과장	도시철도설비부장		도시철도국장
김경수	이명수	정찬웅		03/13 이정화
협 조
	도시철도계획부장		권영찬
	도시철도사업부장		박동룡
	도시철도토목부장		김진팔
	건축계획과장		송종훈

도시철도 건설 인터페이스 T/F팀 운영 계획

2017. 3

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

도시철도 건설 인터페이스 T/F팀 운영 계획

도시철도 건설시 각 분야 간 인터페이스 설계오류 및 누락등 방지를 위해 T/F팀을 구성 인터페이스 부조화를 해소 하고자 함.

1		추진배경

□ 분야간 정보공유 및 긴밀한 업무협조 필요

○ 도시철도 건설공사는 토목, 건축, 설비분야(기계, 전기, 통신, 신호)등 복합공정으로 분야 간 유기적이고 긴밀한 업무 협조 필요

□ 분야간 인터페이스 업무구분 및 설계오류 최소화

○  인터페이스 업무구분을 명확히하여 시공 시 업무분쟁 발생방지

○  실시설계 시 분야 간 인터페이스 설계오류 최소화

2		추진방향

□ 인터페이스 부조화 해소를 위한 T/F팀 구성

○ 분야별 담당 및 외부전문가로 구성된 T/F팀 구성 운영

○ 인터페이스 필요 항목 조사 및 검토 통일된 인터페이스 구축

□ 분야별 전문가 의견을 반영한 인터페이스 항목 확정

○ 전문가 의견을 반영하여 인터페이스 항목 업무구분 조정 및 확정

○ 확정된 인터페이스를 실시설계에 반영 설계누락 방지 및 설계 최적화

3		추진계획

□  T/F팀 구성

○ 운영기간 : ’17. 03월부터 3개월

○ 구성방향

- 토목, 궤도, 건축, 설비분야(기계, 전기, 통신, 신호)담당 및 감리사

○ 조 직 도

		T/F팀 (팀장 : 설비계획과장)
토목, 궤도분야 : 5명			건축분야 : 2명				설비분야 :10명
- 토목 : 3명 ․담당(2),감리사(1) - 궤도 : 2명 ․담당(1),감리사(1)			- 건축 : 2명 ․담당(1),감리사(1)				- 기계 : 2명 ․담당(1), 감리사(1) - 송변전/전차선:2명 ․담당(1), 감리사(1) - 정거장전기 :2명 ․담당(1), 감리사(1) - 통신 : 2명 ․담당(1), 감리사(1) - 신호 : 2명 ․담당(1), 감리사(1)

□ 주요임무(업무분담)

○ 팀  장 : T/F팀 업무총괄

○ 분야별 담당 및 감리사

- T/F팀 운영 (설비계획과)

- 해당분야 인터페이스 항목 조사 및 목록 작성

- 해당분야 전문가 의견수렴, 회의자료 검토 및 정리

- 분야 간 인터페이스 항목 조정 및 확정

4		추진일정

□ 2017.03 : T/F팀 구성

□ 2017.03 : 분야별 인터페이스 필요한 항목 현황조사

□ 2017.04 : 분야별 외부전문가 의견수렴 및 자료검토

□ 2017.05 : 통합회의 및 분야 간 인터페이스 업무구분 조정

□ 2017.05 : 인터페이스 분야별 업무구분 확정

5		행정사항

□ 분야별 인터페이스 발굴 및 목록 작성 제출

□ 분야별 담당 및 외부전문가(감리사)T/F팀 참여

붙임 : 1. T/F팀 명단 1부.

2. 인터페이스 목록 및 업무 구분 작성 양식 1부. 끝.