문서번호	녹색에너지과-6142
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		햇빛발전팀장	녹색에너지과장
김소연		이재성	03/28 권민
협조

「소규모 태양광 발전시설 설치기준 가이드라인」

수립 용역 준공기한 연기 보고

2014. 3

기후환경본부

(녹색에너지과)

「소규모 태양광 발전시설 설치기준 가이드라인」

수립 용역 준공기한 연기 보고

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명 : 소규모 태양광 발전시설 설치기준 가이드라인 수립

▢ 계 약 자 : ㈜그린코드도시건축사사무소 대표 김종성

▢ 계약금액 : 금팔백일십오만오천원(￦8,155,000원)

▢ 계약연월일 : 2014. 02. 28

▢ 착수연월일 : 2014. 03. 03

▢ 준공예정일 : 2014. 04. 01

Ⅱ		용역기한 연기

▢ 연기사유

○ 건축분야 및 태양광분야 전문가 자문회의 과정 등에서 제시된 의견들에 대한 내용검토 및 보완에 따른 과업기간 추가 소요

▢ 변경요청기간

○ 당    초 : 2014. 04. 01

○ 변    경 : 2014. 04. 11

▢ 귀책사유 : 서울특별시

▢ 지체상금부과 : 미부과.  끝.