문서번호	조경과-1365
결재일자	2017.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
이영선	강금완		강인호		김명용		전결 03/14 송천헌
협 조
	전략기획실장					윤대진

사자사 버스정류장 그늘쉼터 조성계획

2017. 3

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

사자사 버스정류장 그늘쉼터 조성계획

사자사 버스정류장 주변에 그늘 제공을 위한 쉘터 및 등의자를 설치하여  이용객 편의 개선

□ 점검내용

○ 관련공문 : 해빙기 및 풍수해대비 다중이용시설 간부 합동점검

(시설과-1319. 2017. 3. 10)

○ 내    용 : 사자사 버스정류장 그늘 조성을 위한 나무식재 요함

□ 현황 및 대책

○ 위   치 : 사자사 앞 버스정류장

○ 현황 및 문제점

- 그늘목이 없어 버스를 기다리는

이용객 불편

- 과거 그늘목을 2~3번 식재하였으나, 토양답압 및 배수불량 등으로 고사함

○ 대   책

수목 식재시 고사 우려가 있으므로, 쉘터 및 의자를 설치하여

그늘쉼터 조성

□ 추진개요

○ 기    간 : 2017. 3. 20 ~ 4. 10

○ 설치물량 : 쉘터(4.36×2.5×3.2m) 2조, 등의자(1500×570×915mm) 4개

쉘 터	등의자

○ 추진방법 : 조달구매 (설치도 포함)

○ 소요예산 : 16,000천원

- 쉘  터 : 7,100천원 × 2조 = 14,200천원

- 등의자 :   450천원 × 4개 =  1,800천원

○ 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리, 재료비, 재료비

□ 기대효과

○ 그늘쉼터 조성으로 버스 이용객 편의 제공.  끝.