함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	납품기한 연기 의뢰(제어실가압장 근무환경 개선용 물품구매)

1. 우리사업소에서 시행중인 『제어실・가압장 근무환경 개선용 물품구매』건에 대한 납품기한을 아래와 같이 연기 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 제어실・가압장 근무환경 개선용 물품 구매

나. 계약자 : ㈜아모스아인스가구 대표 이순종

다. 계약금액(품대) : 1,190,900원(금일백일십구만구백원)

라. 납품기한

- 당초 : 2017. 2. 13 ~ 2017. 3. 15

- 변경 : 2017. 2. 13 ~ 2017. 4. 15

마. 연기사유 귀책소재 : 강남수도사업소

바. 연기사유 : 물품 비치 장소 방수공사 예정

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 납품기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 관련 보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	03/14 박희철
협조자
시행	시설관리과-5832	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개