문서번호	도로시설과-3364
결재일자	2017.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장
박용화	이앙식	03/14 김길남

2017년도 자동차전용도로 방호울타리 정비계획

2017년도 자동차전용도로(토공구간)

방호울타리 및 중앙분리대 정비계획

2017. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

2017 자동차전용도로 방호울타리 정비계획

노후 및 기준 미달인 자동차전용도로 방호울타리에 대한 세부적인 정비계획을 수립하여 도로교통 안전에 만전을 기하고자 함.

□ 시설물 현황

○ 유형별 설치현황

(2017.02. 기준)

총계	개방형 가드레일	일반 가드레일	가드케이블	강성방호울타리	기타(옹벽, 교량)
432,347	114,147	108,373	703	184,377	24,747

○ 연차별 정비계획

(단위 : m, 억원)

구 분	계	2013	2014	2015	2016	2017	2018~
정비연장(m)	62,873	11,897	11,073	14,440	12,039	10,764	2,660
총사업비(억원)	111	21	20	25	20	20	5
비고		정비완료	정비완료	정비완료	정비완료	정비예정	정비예정

○ ’13~16년 정비실적(정비율 79%)

(단위 : m)

구 분	정비율 (%)	총 정비대상	’13 정비	‘14 정비	‘15 정비	‘16 정비	미정비 물량
총계	79	62,873	11,897	11,073	14,440	12,039	13,424
가드케이블	98	39,747	10,323	10,201	10,944	7,576	703
보형방호울타리	39	16,298	370	134	2,089	3,789	9,916
강성방호울타리	100	348	-	348	-	-	-
미설치 구간	57	6,480	1,204	390	1,407	674	2,805

□ 추진현황 및 계획

○ 가드케이블 형식의 비규격 방호울타리 정비 완료('18년 예정)

○ 정비 우선 순위(1~3순위)에 의거 정비시행

○ 방호울타리 전수 조사 실시로 누락 구간 및 추가 정비 대상구간 확인

※ 2017년 중 전수조사 실시(시설관리공단)

□ 방호울타리 정비기준

○ 정비방향

- 기준에 미달 또는 등급상향이 필요한 방호울타리와 미설치구간 중 사고사례, 도로 및 시설물 여건, 노후도 및 안전성 등을 종합 검토하여 정비 우선 순위 결정

- 정비 우선 순위를 근거로 정비 시급성에 따라 현행기준에 적합하게 순차적으로 교체·정비

	※ 정비 우선 순위
· 1순위 : 기준미달, 미설치구간 중 사고 다발 발생구간 · 2순위 : 곡선구간(곡선반경 작은 순) · 3순위 : 직선구간(추락 등 위험도 높은 순) · 기 타 : 1~3순위의 현장여건에 포함되지 않는 구간

○ 설계속도 일반구간 80km/h 이하의 위험구간 ⇒ SB4, SB5 등급 적용

- SB4 등급 설치구간 : 평지의 직선구간, 중앙 녹지 양방향 등

- SB5 등급 설치구간 : 곡선이 심한 구간, 반대차로 영향구간, 2차사고 위험구간

※ 관련근거① : 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부 예규 제69호, 2014.02.14)

설계속도	적용구간	등 급
		SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7
·일반구간 60km/시 70km/시 80km/시	- 기본구간	◎	○
	- 위험구간			◎	○
	- 특수구간(타 도로와 교차 등) - 특수 중차량 통행이 많은 구간				◎	○
·고속구간A 90km/시 100km/시	- 기본구간		◎		○
	- 위험구간				◎	○
	- 특수구간(타 도로와 교차 등) - 특수 중차량 통행이 많은 구간					◎	○

주) 1. ◎표시는 일반적으로 설치하는 등급

2. ○표시는 도로여건이나 시설물 개발 수준 등 위험도에 따라 상향적용 가능한 등급

※ 관련근거② : 도로 방호울타리 보강계획(도로관리담당관-17133호, 2010.08.10.)

- 신규 설치, 보강 교체 정비하는 방호울타리는 SB4등급 이상 설치 원칙

- 예산절감 및 노선의 안전성을 고려하여 필요시 기존 SB3등급과 SB4등급이상 방호울타리를 조합하여 설치하는 방안 검토

□ 2017년 사업개요

○ 사 업 명 : 자동차전용도로(토공) 방호울타리 및 중앙분리대 정비

○ 사 업 비 : 2,000백만원(2017.03~2017.11)

○ 시행방법 : 서울시설관리공단에서 민간대행사업으로 시행

○ 사업규모 : 비규격 방호울타리 및 사고 위험 구간 방호울타리 정비

- 2017년 정비계획 : 5개 노선 27개소(L=10,679m)

(단위 : m)

구 분		방호울타리 형식				비고
		계	가드케이블 (→보형방호울타리)	보형 방호울타리 (→등급상향)	미설치 구간 (→보형방호울타리)
총계	개소	26	4	17	5
	연장(m)	10,764	631	7,328	2,805
강변북로	개소	7	3	2	2
	연장(m)	2,028	488	1,330	210
올림픽대로	개소	13	1	10	2
	연장(m)	7,407	143	4,814	2,450
동부간선로	개소	4	-	4	-
	연장(m)	1,120	-	1,120	-
서부간선로	개소	1	-	-	1
	연장(m)	145	-	-	145
국회대로	개소	1	-	1	-
	연장(m)	64	-	64	-

※ 자재 선정 및 시공법에 따라 예산범위내에서 정비 구간 및 물량 조정

□ 향후 추진계획

○ 2017.01.~03. : 현장조사 및 대상지 선정

○ 2017.03. : 설계 및 계약심사, 예산 배정

○ 2017.04. : 공사계약 및 착공

○ 2017.04.~06. : 방호울타리 현황조사 실시 및 추가 정비필요 구간 검토

○ 2017.11. : 공사 준공 및 정산

붙임 : 1. 정비대상 현황(총괄) 1부.

2. 정비대상 현황(잔여구간) 1부.

3. 2017 정비구간 현장조사서 1부.(별도붙임)

4. 2017 정비구간 위치도 1부.  끝.