문서번호	시설보수과-1635
결재일자	2017.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정순명		윤승범	03/15 이인근
협 조
	주무관			윤상철
	운영과장			정종기
	주무관			김원섭
	주무관			강신영

#2,#3처리장 수문권양기 교체공사 시행

2017. 03

중랑물재생센터

(시설보수과)

#2,#3처리장 수문권양기 교체공사 시행

기전설비 5개년 보수계획 및 2017년 단위사업계획에 의거 노후되거나 수동식 수문권양기 대하여 단위공정 처리효율을 제고하고 수질이상시 실시간 신속한 제어가 되도록 전동식으로 교체하고자함.

1	개 요

❍ 수문권양기 교체 대상

- #2처리장 초침 및 종침 수문권양기

ㆍ설치현황 : 28개소(초침8개소, 분배조 4개소, 종침16개소)

ㆍ설치년도 : 초침(2007년),분배조(2003년),종침(2007년)

ㆍ교체대상 : 26개소 (초침6개소 수동식 노후, 분배조4개소 전동식              노후, 종침16개소 수동식 노후)

- #3,4처리장 종침 수문권양기

ㆍ 설치현황 : 총 160대

ㆍ 수동식 : 128대 (A,C,D,E계열)

ㆍ 전동식 : 32대 (B계열)

ㆍ 설치년도 : #3처리장(1987년), #4처리장(#1997년)

ㆍ 교체대상 : #3처리장 C계열 16대

- 내구연수 : 권양기 9년(2016 조달청고시)

- 용 도 :

단위공정(초침, 종침) 유입량을 실시간 계열별, 지별 균등분배를 통하여

정밀한 유량조절로 단위공정 처리기능을 원활하게 하고 수질이상시 긴급

제어하여 수질악화를 예방하는 등, 처리공정 주요기능 담당

(1차,2차침전지 유입량 균등분배시 작동, 수질변화시 유입량 지별 재조절)

2	2017년도 단위사업(교체공사) 집행

❍ 사업근거

- 수처리분야 단위사업 발주계획(시설보수과-644호) 및 배정예산

ㆍ3처리장 2차침전지 수문구동기교체(NO7번,8번) 284,000천원

ㆍ 2처리장 침전지수문 문비 및 엑추에이터 교체(NO15번) 100,000천원

❍ 전동식 수문권양기 관급자재 구매

- 건 명 : 수문권양기(전동엑추에이터) 관급자재 구매

- 교체대상 : 42대(구매대상 21, 관급자재 재고 21)

- 사 양 : 수문권양기(전동엑추에이터2톤,3톤,식별번호 21190320~21)

- 구매방법 : 조달구매 (제3자단가계약품)

- 납품기한 : 계약일로부터 50일

- 하자보증기간 : 납품검사완료일로부터 1년

- 소요예산 :

․ #2처리장 종침 수문권양기 5대 x 8,700,000원 = 43,500천원

․ 스템(40mm) 5m x 5대 x 147,000원 =3,675천원

소 계 (2처리장) = 47,175천원

․ #3처리장 종침 수문권양기 16대 x 8,700,000원 = 139,200천원

․ 스템(40mm) 4m x 16대 x 147,000원 = 9,408천원

소 계(3처리장)   = 148,608천원

❍ #2,#3처리장 수문권양기 교체공사

- 건 명 : 수문권양기 교체공사

- 개 요 : 철거 36대(#2 : 분배조4, 종침16, #3 : 종침16)

설치 42대(#2 : 분배조4, 초침신설6, 종침16, #3 : 종침16)

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 참가자격 : 기계설비공사업, 상하수도설비공사업면허 소지자

- 준공기한 : 계약일로부터 100일

- 하자보증기간(보증금율) : 준공검사일로부터 2년(3%)

- 소요예산 : 90,000천원

❍ #2,#3처리장 전기배선공사

- 건 명 : 수문권양기 전기배선공사

- 개 요 :  전원케이블 및 분전반 PANEL, 기타 부속설비 1식

-  장 소 :  #3처리장 16개소, #2처리장 22개소(초침 6, 종침 16)

- 계약방법 : 전자공개수의계약

- 참가자격 : 전기공사업면허 소지자

- 준공기한 : 계약일로부터 100일

- 하자보증기간(보증금율) : 준공검사완료일로부터 1년(2%)

- 소요예산 : 98,000천원 (#3처리장 45,000천원, #2처리장 53,000천원)

▷ 수동식 노후 수문권양기 실태

( #3처리장 C계열 )        (#2처리장 최종침전지)       (#2처리장 분배조)

끝.