문서번호	설비부-4189
결재일자	2017.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양성구		김창균	03/15 권오식
협조

『마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

『마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사』

설계변경 검토보고

「마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사」관련, 건설사업관리 기술단으로부터 제출된 설계변경 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  사업개요

공 사 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원조성 기계설비공사

위    치 : 서울시 마포구 성산동 산53-1번지 일대

규    모 : 유류탱크 리모델링 5개소, 지원시설 신축 1개소,

연면적 7,422㎡

공사기간 : 2015.12.28. ~ 2017.04.27.

계약금액 : 2,115,503,900원

계 약 자 : ㈜동보엔지니어링 외 2

□  관련근거

마포감 제2017-415호(`17.03.14.) : 공사 내역변경 검토 보고

□  변경사항

변경사유 : 현장공정에따라 금액 및 공사기간 변경없이 1, 2차간 품목조정

계약금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	비 고
1차	380,209,000	380,209,000	변경없음
2차	1,735,294,900	1,735,294,900	변경없음
총차	2,115,503,900	2,115,503,900	변경없음

공사기간

구 분	당 초	변 경	비 고
1차	2015.12.28.~2017.04.27.	2015.12.28.~2017.04.27.	변경없음
2차	2016.04.15.~2017.04.27.	2016.04.15.~2017.04.27.	변경없음
총차	2015.12.28.~2017.04.27.	2015.12.28.~2017.04.27.	변경없음

건설사업관리기술자 검토의견

‣ 현장 공정 진행사항을 감안하여 계약금액 변경없는 차수(1차 ↔ 2차)간 내역변경 사항으로서 설계변경이 타당함.

□  보고자 의견

공원조성공사 현장의 공정 진행상황을 반영한 차수간 내역 조정을 위한 변경사항으로서 실정보고 사항을 승인하고 계약변경 추진코자 함.

붙임  검토의견서 1부.  끝.