함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[2016년 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)]-3차

우리사업소에서 시행중인 「2016년 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가)-2차

나. 도 급 자 : 부경건설(주) 대표 유부기,  부성이앤씨(주)  호병림

다. 공사기간 : 2016.04.19 ~ 2017.06.30

라. 변경사유 : 계약물량 증.감 발생

마. 설계변경 및 차수별 계약금액 변경내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감 액	비 고
총 계약금액	698,778,890원	698,778,890원	0
1차수 금액	489,145,000원	372,240,000원	감116,905,000	2016.04.19.~2016.12.31
2차수 금액	209,633,890원	326,538,890원	증116,905,000	2017.01.01.~2017.06.30

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(소블록배급수망개선)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비

(수도계량기보호통보온재등정비)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(배급수비)

소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설설치및보수,시설비및부대비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

소방용수시설등의설치 및 관리, 소방용수시설설치및설치,시설비및부대비

따로붙임 : 1) 설계변경 방침서 1부.

2) 사전전심의 의결서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	한규수		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	김기상		남부수도사업소장	03/15 전영석
협조자	행정지원과장	이두영
시행	시설관리과-7065	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4596	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개