문서번호	도로시설과-3500
결재일자	2017.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	터널복개팀장	도로시설과장
김창환	代전성민	03/16 김길남

예산 재배정 검토 보고

- 매봉터널 보수 외 1건 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3.

예산 재배정 검토 보고

- 매봉터널 보수 외 1건 -

2017년 도로시설물 유지관리사업「매봉터널 보수」및「가락지하차도외 1개 시설 보수」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 2016년 매봉터널 정밀안전진단용역

○ 2015년 삼성교 외 7개소 정밀점검용역(가락지하차도 포함)

○ 2015년 영동대교 외 4개소 정밀점검용역(천호지하차도 포함)

⇒ 점검결과 발생한 1순위 보수보강 대상 적기조치로 시설물 안전확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 매봉터널 외 2개소 보수

- 예산 사업명 2건 통합 발주(매봉터널 보수, 가락지하차도외 1개시설 보수)

○ 위    치 : 매봉터널, 가락지하차도, 천호지하차도

○ 예 산 액 : 414,000천원

○ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2017. 12.

○ 주요내용 : 아스팔트 포장 44.4a, 타일 내오염 도장 3,009㎡ 등

《 시설물 현황 》

시설명	준공일	규 모	구조형식	통과높이	노선명
매봉터널	‘92. 7. 8	L=250m, B=25m	ARC	4.5m	언주로
가락지하차도	‘85. 9. 30	L=300m, B=18m	RC Box	4.3m	남부순환로
천호지하차도	‘97. 10. 31	L=355m, B=16m	RC Box	4.3m	천호대로

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 터널 및 지하차도 보수공사비 : 414백만원

- 매봉터널 보수 : 339,000천원

- 가락지하차도 외 1개소(천호지하차도) 보수 : 75,000천원

※ 도급비 5억원 미만으로 계약심사 비대상

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 진단 및 정밀점검 용역결과 1순위 보수보강 대상(포장 및 도장 보수)

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 주요 설계내역 검증 : 내오염도장, 아스팔트 덧씌우기, 단면보수 등

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	산 출 내 역
계	414,000	0	414,000	0
시설비	339,000	0	339,000	0	- 매봉터널 보수
시설비	75,000	0	75,000	0	가락지하차도 외 1개소 보수

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2017. 03. : 예산 재배정

○ 2017. 03. ~ 2017. 04. : 공사 발주

○ 2017. 05. ~ 2017. 12. : 착공 및 공사 시행

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체.    끝.