함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 구의아리수정수센터 토목·건축 시설물 정비공사(장기계속공사))

우리 정수센터에서 시행중인 『2016년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명: 2016년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)

○ 도 급 자: 주식회사 대륜씨에스 대표 김혜심

○ 도 급 비: 금82,180,400원

○ 공사기간: 2016. 5. 3. ~ 2017. 3. 31.

나. 설계변경

○ 차수 및 설계변경 금액(도급비)

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감액(원)
1차수 금액	76,260,000	76,260,000	-
2차수 금액	5,920,400	0	감5,920,400
총부기금액	82,180,400	76,260,000	감5,920,400

○ 설계변경사유

- 미시행 공종 물량 감 부분 설계 반영

다. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙 임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 관련 보고서 1부.  끝.

주무관	윤기영		정수시설과장	代김종훈		구의아리수정수센터소장	03/16 이달영
협조자	주무관	한미경		주무관	김동석
시행	정수시설과-843	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	3146-5480	/전송	3146-5409(주간)5408(야간)	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개(5)