투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	담비 스라소니 전시장 관급자재 납품기한 연기 의뢰

1. 조경과-1682(2014.3.28.)호와 관련입니다.

2. ‘담비 스라소니 전시장 조성공사’의 준공기한이 연기됨에 따라 관급자재(철근, 레미콘)의 납품기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 담비 스라소니 전시장 관급자재(철근, 레미콘) 조달구매

나. 납품위치 : 소동물관(담비 스라소니 전시장)

다. 물량 및 계약금액

물품명	규 격	수량	계약금액(원)	계약상대자	비 고
레미콘	25-18-08	25.0	6,371,730 (수수료 포함)	서울경인레미콘공업(협)
	25-24-12	77.36
이형철근	D13	4.07	3,135,300 (수수료 포함)	동국제강(주)

라. 납품기한 연기

- 변 경 전 : 2014.3.31.

- 변 경 후 : 2014.4.20.

마. 연기사유 : 담비 스라소니 전시장 조성공사 준공기한 연기에 따라 관급자재 납품기한 연기.  끝.

	조경과장
주무관	이옥하		조경과장	03/29 이성주
협조자
시행	조경과-1683	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 광명길42 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	500-7550	/전송	500-7993	/		/	대시민공개