문서번호	정수시설과-840
결재일자	2017.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		代김종훈	03/16 이달영
협조

2016년 구의아리수정수센터 토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경 심의결과 보고

2017. 3.

구의아리수정수센터

2016년 구의아리수정수센터 토목건축시설물 정비공사(장기계속공사)

설계변경 심의결과 보고

토목․건축 시설물 정비공사(장기계속공사) 시행 중 물량의 증·감 및 신규공정에 대한 설계변경 심의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		사업현황

□ 공사개요

❍ 사 업 명: 2016년 구의아리수정수센터 토목건축 시설물정비공사

❍ 사업기간: 2016. 05. 02. ∼ 2017. 03. 31.

❍ 계약금액: 금82,180,400원

❍ 계 약 자: 주식회사 대륜씨에스 대표 김혜심

❍ 공사규모

- 토공: 콘크리트포장절단(100~150mm)외 14종

- 구조물공: CONC인력비빔타설(소형구조)외 14종

- 부설공: 고강성PVC이중벽관 접합 및 부설(D=200mm) 외 35종

2		설계변경 사항

□ 주요 변경내역

❍ 콘크리트 파쇄물운반(2.5DT) 공종 물량 감

❍ 무기계 폴리머몰탈 미장(벽체1회,T=5㎜)외 6종 공종 물량 감

❍ 강관부설(150㎜) 외 6종 공종 물량 감

❍ 사급자재 스틸그레이팅(295*995*50)외 2종 공종 물량 감

□ 총괄 변경내용

❍ 세부 물량 및 금액변경 사항: 첨부 내역서 참조

❍ 변경내역

구 분	당 초	변 경	증·감
공급가액	74,709,455	69,327,273	-5,382,182
부가세	7,470,945	6,932,727	-538,218
도급금액	82,180,400	76,260,000	-5,920,400

3		심의결과

□ 설계변경의 타당성: 타당

□ 감 물량 및 제잡비 산정과 적용 적정성 여부: 적정

□ 각종 제반규정 준수 여부: 준수

4		조치의견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임: 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.