투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	정산 설계변경 시행(2013년 포장도로 굴착복구공사-남부)

우리사업소에서 시행중인 2013년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 포장도로 굴착복구 정비공사(연간단가)-남부

나. 공사기간 : 2013.3.20 ~ 2014.3.30

다. 계 약 자 : (주)예스코서비스 대표 박채신

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
총공사비	2,367,631,550	2,273,301,000	감) 94,330,550
도 급 비	1,702,541,550	1,608,211,000	감) 94,330,550
관 급 비	665,090,000	665,090,000	-

라. 설계변경(정산)내역

마. 변경사유 : 2014년 민간위탁 제설용역 정산

바. 공사기간 : 변경 없음

사. 예산과목 : ①도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 (101,937,000원)

②도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 (1,299,144,000원)

③도로관리과, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 일반운영비, 사무관리비 (177,130,000원)

④도로관리과, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비 (10,000,000원)

⑤도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 사무관리비 (20,000,000원)

붙  임 : 1. 설계변경(정산)방침서 1부.

2. 설계변경(정산)내역서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

주무관	정철식		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	03/19 민승기
협조자	주무관	한수영		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1624	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	대시민공개