투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	북부여성창업플라자 조성공사 설계용역 계약변경(용역기간 연장) 의뢰

우리본부가 시행중인『북부여성창업플라자 조성공사 설계용역』과 관련하여 다음과 같이 계약변경(용역기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북부여성창업플라자 조성공사 설계용역

나. 계 약 자 : ㈜건축사사무소 기오헌

다. 계약요청 내용 : 용역기간 연장(123일)

구 분	당 초	변 경	증․감
계약금액	375,617,000원	375,617,000원	변경없음
용역기간	‘15.6.17 ~ ’17.3.15	‘15.6.17 ~ ’17.7.15	123일 연장

라. 연장사유 : 구)북부법조단지 마스터플랜 설계용역과 연계를 위한 용역기간 연장

붙임 : 1. 설계용역 기간연장 검토보고서 1부.

2. 합의서 등 관련문서 각 1부.  끝.

	건축부장
주무관	신효섭		건축관리과장	곽동호		건축부장	03/15 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-4468	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)