투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(승객용 승강기) 납품기한 연기 의뢰(서울 재사용플라자 건립 기계설비공사)

우리 본부에서 시행 중인「서울재사용플라자 건립 기계설비공사」에 소요되는 관급자재(승객용 승강기)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내용

품 명	계약번호	계약자	수량	계약금액(원) (변경없음)	납품 기한		비고
					당 초	변 경
승강기 구매 (승객용)	00156114000	㈜트라비스엘리베이터	2대	113,875,690	2017.3.15	2017.3.31	증 16일

나. 연기사유 : 선행 건축공정 공사기간 연장(‘17.3.15 → ’17.3.31)에 따른 승강기 납품기한 연장

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 1) 납품기한 연기 검토서 1부

2) 계약자 동의서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이종근		열빛총괄과장	유병기		설비부장	03/15 권오식
협조자
시행	설비부-4185	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개