투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고-154kv 변압기 전력케이블 공사

슬러지재활용과-365(2014.3.26.)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 계약건명 : 154kv 변압기 전력케이블 공사

나. 계약금액 : 감 금3,300,000원(금삼백삼십만원)

- 변경 : 금83,491,480원(금팔천삼백사십구만일천사백팔십원)

- 당초 : 금86,791,480원(금팔천육백칠십구만일천사백팔십원)

다. 변경사유 : 고압케이블 철거 물량 감액 정산

라. 계 약 일 : 2013년  12월  23일 (변경계약일 : 2014년 03월 27일)

마. 착 공 일 : 2013년  12월  23일

바. 준공기한 : 2014년  06월  10일

사. 계약업체 : 주식회사 세진종합이엔씨

사업자등록번호 119-86-65219

(☎ 02-2617-5377)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	정은경		관리과장	박노원		중랑물재생센터소장	03/31 채희정
협조자
시행	관리과-3764	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)