문서번호	시설관리과-2655
결재일자	2017.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
홍석현		정윤홍	03/20 강신재
협 조

2017 노후밸브정비 세부 추진계획

2017. 3.

	상수도사업본부
	시설안전부

2017 노후밸브정비 세부 추진계획

2017년도 BSC성과관리 사업에 노후밸브정비가 포함됨에 따라 정비사업을 철저히 추진코자 세부 추진계획을 보고 드림.

□ 노후밸브정비

❍ 정비목표 : 노후밸브 3,200개소 정비 (예산 25,900백만원)

❍ 사업소별 정비목표

(단위 : 백만원, 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비 목표	3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
소요 예산	23,200	3,950	2,465	3,590	940	3,590	2,865	3,950	1,850
잔여 노후밸브	35,144	6,376	3,747	5,216	2,030	4,728	4,496	5,537	3,014

※ 본부사업 : 대형밸브 점검·정비(1,000백만원),  시설물 감리비(800백만원), 예비비(900만원)

	노후밸브정비 추진방향
❍ BSC 성과관리사업에 포함됨에 따른 분기별 정비목표 설정 ❍ 노후 상수도관 정비공사 예정구간 추가 노후밸브 정비현황 관리 ❍ 소구경 노후밸브 교체시 매몰형 중형밸브실 설치 검토 ❍ 관련 부서 및 점검용역시 지적된 대구경 노후밸브 우선 교체

□ 세부 추진계획

❍ 사업소별 분기 정비목표량 설정

- BSC 성과관리 성공적인 추진을 위해 분기별 정비목표 필요

- 사업소별 노후밸브 정비량을 분기별로 할당하여 정비실적을 관리

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 계	3,200	545	340	495	130	495	395	545	255
1 분기	80	10	10	10	10	10	10	10	10
2 분기	1,040	175	110	160	45	160	130	175	85
3 분기	1,040	180	110	160	40	160	130	180	80
4 분기	1,040	180	110	165	35	165	125	180	80

❍ 노후 상수도관 정비공사 예정구간내 노후밸브 현황파악

- 노후 상수도관 정비공사 등 향후 공사예정구간은 노후밸브 교체 금지

- ’17 노후 상수도관 정비공사 구간내 노후밸브 현황파악(제출양식 붙임2)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총계	개 소	55	11	3	9	6	5	9	6	6
	구간(㎞)	80.5	14.2	2.9	12.9	8.4	9.2	16	7.9	9
송배 수관	개 소	19	4	1	3	2	1	3	3	2
	구간(㎞)	18	3.6	0.6	2.8	2.3	1.3	3.9	2	1.5
배급 수관	개 소	36	7	2	6	4	4	6	3	4
	구간(㎞)	62.5	10.6	2.3	10.1	6.1	7.9	12.1	5.9	7.5

❍ 소구경 노후밸브 교체시 매몰형 중형밸브실 우선설치 고려

- 4차선이하 도로․보도에서 300㎜ 이하 정비시 매몰형 중형밸브실 설치

- 사업소별 30개소 이상 매몰형 중형밸브실 설치(향후 경영실적 평가반영)

❍ 대구경 노후밸브는 선별적 우선 추진

- 급수운영 부서(배수과)의 노후밸브 정비요청에 대해 우선 정비

- 대형밸브 점검정비시 지적된 노후밸브에 대해서는 검토하여 우선 정비

< 대형밸브 점검정비 지적된 노후밸브 현황 >

※ 총 432건 점검지적(세부현황 붙임3)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검 지적		432	59	29	7	1	68	74	115	79
	400~900㎜	299	44	24	5	1	62	51	77	35
	1,000㎜이상	133	15	5	2	-	6	23	38	44

□ 행정사항 : 수도사업소

❍ ’17년 노후밸브 교체실적 월보 제출(양식 : 붙임1, 4월부터)

- 사업소 시설관리과에서 총괄하여 전원 실적을 익월 5일까지 제출

- 수도사업소별 분기 할당량을 고려하여 정비실시

❍ 관할 소방서에 소화전 노후밸브 운영관리 협조요청 공문발송

- 향후 예산편성시 소화전 노후밸브 교체비용 포함

- 소화전 자체 점검시 관할 수도사업소에 사전 협의

붙임 : 1. ’17 노후밸브 정비실적 제출양식(월보) 1부.

2. ’17 노후 상수도관 정비예정구간 노후밸브 현황 제출양식 1부.

3. ’15~’16 대형밸브 점검정비 결과(노후밸브 발췌) 1부. 끝.