문서번호	기획관리과-2643
결재일자	2017.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	03/20 이계헌
협조
	★인터넷통신과장		代전성권

청소근로자 휴게실 리뉴얼 공사 계획

2017.  03.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

청소근로자 휴게실 리뉴얼 공사 계획

우리 센터내 청소근로자 휴게실을 관련 규정에 적합하게 리뉴얼 공사를 아래와 같이 추진함으로써 쾌적한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 청소근로환경시설 가이드라인 적용

청소근로환경시설 가이드라인 시행계획 (시장방침 제92호, ’14. 4. 2)

- 남·여별 공간을 별도로 구성하여 이용 편의성을 제고

- 악취 및 탈취를 할 수 있는 마감재료를 사용하여 청결도 유지 등

○ 최근 시설물 점검결과에 대한 조치

- 옥외 주차장 천정 슬래브 균열 및 누수발견 (’15. 9월)

□ 세부 추진계획

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 데이터센터 청소근로자 휴게실 리뉴얼 공사

○ 공사기간 : 착수일로부터 10일

○ 공사범위 : 면적 약 37㎡

- 벽체 단열 시공 및 마감재 : 기존마감재 철거 후 재시공

- 바닥 전기온돌 설치(일부 목상 설치), 천정 배수판 설치 후 석고마감

- LED 다운라이트 설치, 회로분리 및 전열공사 / 출입문 남·여 분리 등

□ 시공자 선정 방법 : 수의계약 (1인견적)

○ 공사 금액이 소액으로 관련 규정에 의거 수의계약 추진

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

□ 소요 예산 :******************

○ 산출내역

(단위 : 천원)

공종		세부내용		소요금액
철거		자재소운반, 현장정리 정돈 등 철거 (바닥, 집기, 벽체타공 등)		*****
		폐기물 처리 (1톤, 2대)		***
마감		단천장 (목상 + 합판)/석고 2P/AL몰딩 공사		*****
		건식벽체 (S65mm+석고9.5mm2p)설치 /벽지(실크)		*****
		바닥구조틀 (목상+합판 12mm)/전기온돌/장판 2.2t		*****
		신발장 (MDF/합판+필름) 제작 설치		*****
		방화문 (하드웨어 + 프레임) 1개소 추가 설치		***
		롤브라인트 / 천정 SUS지수판 설치		*****
전기		다운라이트 6인치 15w 10EA / 화재감지기 설치		***
		LED 등기구 2EA 설치 / 회로분리 및 전열공사		***
		센서 등 / 등기구 (500*500 LED) 각 2EA 설치		***
		탈의실 구분 커튼 설치		***
		냉·난방기 이설		***
이윤 및 제경비				*****
소 계				******
부 가 세				*****
【 합 계 】				******

○ 예산과목

- 정보서비스의 안정적 제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

□ 추진일정

○ ‘17. 03.	:	추진계획 수립
○ ‘17. 03. 24	:	시공사 전정 및 착공
○ ‘17. 04. 03	:	공사완료

□ 행정사항

○ 전기공사부분 공사 감독업무 수행   : 인터넷통신과

붙임 : 견적서 2부.  끝.