투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 건설사업관리용역(2차-2회) 계약변경 의뢰

1. 건축부-4688(2017.03.20)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 건설사업관리용역”과 관련하여, 아래와 같이 제2회 설계변경에 따른 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 건설사업관리용역(2차-2회)

나. 계 약 자 : ㈜영화키스톤건축사사무소 외1 (대표 김주열)

다. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감
용역 기간	총차	2015.01.10~2017.05.30	2015.01.10~2017.05.30	변경없음
	2차	2015.12.16~2017.03.31	2015.12.16~2017.05.30	증) 60일
계약 금액	총차	1,561,019	1,561,019	변경없음
	2차	650,000	1,023,000	증) 373,000

라. 예산과목 : 어린이병원, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준 제고, 어린이병원 발달센터 건립, 감리비(401-02)

붙임 : 1) 설계변경 방침서(건축부-4688호) 1부.

2) 건설사업관리용역자 계약 변경 요청서(합의각서 및 변경내역서 포함) 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김대식		의료시설과장	김충범		건축부장	03/20 김진용
협조자
시행	건축부-4739	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2648	/전송	02-3708-2659	/	kd3286@seoul.go.kr	/	부분공개(5)